문서번호	교통운영과-15557
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권상운		고광섭	08/20 강진동
협조

『2014년 교통신호체계 운영용역(강남권)』 설 계 변 경  보 고 1

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

교통운영과

『2014년 교통신호체계 운영용역(강남권)』

설 계 변 경  보 고

강남권역 신호운영 사무실 개선공사(신규) 및 운영차량 감소 등 물량변경 사항에 대한 설계변경 보고임.

□  용역개요

○   용 역 명 : 2014년 교통신호체계 운영용역(강남권)

○   용역기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

○   계약업체 : ㈜건영이앤씨, ㈜대한콘설탄트

○   계약금액 : 1,269,970,000원

□  설계변경 근거

○   강남권 신호운영 사무실 개선계획(교통운영과-9130, `14.5.18)

□  물량변경(증・감) 내역

○   운영차량 효율적 사용(9대 → 6대) : 3대 감

‣ 총 6팀(센터1팀, 현장 5팀)으로 팀별 1대씩 사용

○   「강남권 신호운영 사무실 」 신설 1식

‣ 바닥・벽・천정 샌드위치판넬 설치(전기공사 포함)

□  변경사항

물량변경	당 초	신호운영차량 9대 운영
	변경후	신호운영차량 6대 운영 : 3대 ‘감’ 사무실 신규설치 1식 : 사무실 신설 1식 ‘증’
	증․감액	금액 변경사항 없음
계약금액	당 초	금액 변경사항 없음
	변경후

□  행정사항

○   재무과 계약변경 요청

붙임 : 설계변경 내역서(사무실 준공사진 포함) 1부.

합의각서 1부.    끝