문서번호	기전과-7738
결재일자	2014.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
강운규	08/20 정윤식

「2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

설계변경보고(제1차)

2014. 8

북부도로사업소

기전과

「2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

설계변경보고(제1차)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)』에 대해 감리사로부터 설계변경(제1차)보고 접수되어 이를 검토하고 보고함.

□ 관련 근거

○ 2014. 08. 19. 2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

-제1차설계변경 제출건

- 문서번호 건영 본 2014-88호(2014.08.19.) (주)건영이앤씨

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

○ 시 공 사 : **************

○ 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 2015. 2. 28

○ 공사금액 : 금78,145,970원

□ 설계변경 내용

○설계변경 사유

- 연간단가 공사의 특성상 추정물량을 산정하여 공사를 추진함에 따라 당초설계물량과 실작업물량과의 차이로 인한 물량변동 발생

○설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	78,145,970	78,145,970	0
공 급 가 액	71,041,791	71,041,791	0
부가가치세	7,104,179	7,104,179	0

○주요물량 변경내용

(단위:매)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
1. 교통표지판 신설	47	228	181	(증)
2. 교통표지판 교체	47	187	140	(증)
3. 교통표지판 철거	45	182	137	(증)
4. 교통표지판 철주	34	86	52	(증)
5. 교통표지판 부착대	38	126	88	(증)
6. 도장 및 방향위치조정	8	9	1	(증)
계	219	818	599	(증)

□ 검토의견 및 조치계획

○ 위와 같이 접수된 감리사의 설계변경(제1차)에 대해 검토한 결과 적합하여 승인 처리코자 합니다.

붙임 : 1 감리사 설계변경 요청 공문 1부.

2 변경내역서 1부. 끝.