문서번호	도시철도토목부-9161
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
황왕연		김성호	08/21 이은상
협조

『지하철 9호선2단계 917공구 건설공사』

준공기한 연기요청건 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.08

서울시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철 9호선2단계 917공구 건설공사』

준공기한 연기요청건 검토보고

지하철917공구 건설공사와 관련 계약상대자로부터 진행중인 9차공사에 대하여 절대공기 부족 등의 사유로 준공기한 연기 요청이 있어 적정여부를 검토하고 그 결과를  보고드림.

Ⅰ		관련근거

○ 9차공사 공정관리 철저지시 회신 및 공기연장 요청(GS건설 사업개발실 20*******01호, ‘14.08.01)

○ 917공구 9차공사 준공기한 연기요청 검토(선진철감 2014-406호, ‘14.08.07)

○ 합동회의개최(2014.08.05)

Ⅱ		공사현황

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사

○ 위    치 : 강남구 삼성동(광동한방병원) ~ 송파구 잠실동(아시아선수촌APT)

○ 사업개요 : 연장 1,590m

- 본  선 : 1,425m(개착 51.6m, 터널 1,373.4m),

- 정거장(1개소) : L=165m(930정거장), 환기구 3개소

○ 사업기간 : ‘08.06.02 ~ ’14.12.31(9차:‘13.03.08~’14.08.31)

○ 총사업비 : 114,972백만원(9차  31,700백만원)

○ 시 공 사 : GS건설(주) 외 2개사

○ 감 리 사 : (주)선진엔지니어링 종합건축사 사무소 외2

○ 공   정 : 【계획 96.5%/실적 93.1%/대비 96.5%】▸'14.08.11 현재

Ⅲ		계약상대자 연기요청 사유

○ 정거장 위치이동 재설계로 인한 전체 공정지연

○ 환승통로 설계변경으로 인한 지연

○ 지장물(상수관) 이설 착수지연

○ 공사추진중 업무협의 지연

○ 위 사유로 준공기한 3개월 연기요청

Ⅳ		연기사유에 대한 책임감리의견

연번	시공사 연기요청 사유	책임감리원 의견	비고
1	-정거장 위치이동 재설계로 인한 전체 공정지연	-9차공사 발주 이전에 발생된 사항으로 9차공사 준공기한 연기사유에 해당되지 않음
2	-환승통로 설계변경으로 인한 지연	-9차공사 1회 준공기한 연기시 반영된 사항으로 금회 연기사유에 해당되지 않음
3	-지장물(상수관) 이설 착수지연	-상수도 이설공종은 계약금액 조정이 안된 상태로 9차공종에 해당되지 않음 -시공사에서 하도급업체 선정이 늦어진 관계로 상수도 이설 착수 지연 -상수관이 환승통로 TOP슬라브에 저촉되어 구조물 시공중에 이설하여도 공사추진에 문제가 없음 -위 사항으로 연기사유에 해당되지 않음
4	-공사추진중 업무협의 지연	-사전협의 지연 ․환승통로 언더피닝 구간은 기본설계 지반조사 보고서에도 파쇄대가 확인된 구간으로 실시설계시 반영되어야하므로 설계오류사항으로 승인된 시공계획 수정사항은 준공기한연기사유에 해당되지 않음. -휴일 검측 미시행 ․감리 휴일검측 미시행일자, 공종, 지연일자 등 관련자료 제출요망

Ⅴ		조치계획

○ 시공사에서 제출한 준공기한 연기요청에 대하여 책임감리원의 검토결과 절대공기 부족에 의한 공기연기 사유에 해당되지 않는 것으로 검토되어 준공기한 연기는 곤란함을 GS건설(주)에 회신코자 함

첨부  책임감리원 검토의견 및 시공사요청 공문  1부.  끝.