투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	GS건설(주) 대표 임병용
(경유)
제목	공기연장 요청건에 대한 회신

1. GS건설 사업개발실 20*******01호(2014.08.01)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리본부와 귀사간에 계약체결(‘13.03.08)하여 진행중인 『서울 지하철9호선 2단계 917공구 건설공사(9차)』와 관련 절대공기 부족등의 사유로  공기연장 요청한 사항에 대하여 책임감리원으로 하여금 검토케한 결과, 공기연기 사유에 해당되지 않는다고 검토되어 준공기한 연기는 곤란함을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황왕연		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	08/21 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-9158	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청남산별관4층	/
전화	02)772-7210	/전송	02)772-7306	/	hwy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개