투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	준공기한 3차 연기 시행(양묘장 기반시설 정비공사 설계용역)

1. 조경지원과-9226(2014.8.21)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『양묘장 기반시설 정비공사 설계용역 』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 양묘장 기반시설 정비공사 설계용역

나. 도 급 액 : 금4,580,000원(금사백오십팔만원)

다. 용역기간 : 2014.5.27. ~ 2014. 8.25

라. 도 급 사 : 피오에이건축사사무소 대표 백승구

마. 준공기한 연기

1) 연기사유 : 남양주시 건축관련 협의 중 내곡양묘장 창고 건물 신축

에 따른 대지구획 확정, 형질변경, 창고 위치 선정 등

사전 절차 이행 후 건축허가(신고)가 가능함에 따라

절대 공기 부족으로 준공기한 연기

2) 준공기한 변경

구 분	변경 전	변경 후
내 용	2014.5.27 ~ 8. 25	2014.5.27 ~ 9.30

바. 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 양묘장 기반시설 정비, 시설비

붙임 : 보고서 1부. 끝.

주무관	채해바래		조경지원과장	08/21 김제중
협조자	주무관	박종천		주무관	김인선		주무관	김덕수
시행	조경지원과-9258	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동395)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-2181-1174	/전송	02-2181-1179	/	bala@seoul.go.kr	/	대시민공개