문서번호	녹지관리과-8432
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김대수	박병구	김윤철	08/21 이용태
협 조

“한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사” 설계변경 검토보고

2014. 08.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

“한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사”

설계변경 검토보고

한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사 시행중 설계 변경 사항이

발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 한양도성 순성길(남산,낙산)조성공사

나. 공 사 비 :548,370,050원(도급비: 492,085,000, 관급자재비: 56,285,050원)

다. 공사기간 : 2013. 12. 24 ~ 2014. 09. 30

라. 도 급 자 : ㈜그룹이십일 대표 이 용 훈

2. 설계변경 검토내용

구 분	현황 및 문제점	개선 방안	현 황 사 진
	○팔각정배드민턴장옆 기존 고압블럭(경계석포함) 및 목재 계단을 철거하고 흙포장으로 계획되어 있으나 기존 시설물 상태가 양호함	○시설물이 양호하므로 존치 -소형고압블럭포장철거:82M2->0 -경계석(150*150*1000)철거:63m->0 -목재계단(w2,200)철거: 1개소->0 -목재계단(w1,600)철거:1개소->0 -흙포장295.7m2->235.6M2 -돌계단(w1,600):63단->42단 -돌계단(w2,200):14->0
	○팔각정배드민턴장의 콘크 리트 옹벽과 배수로를 철거 토록 되어 있으나 성벽과 연접되어 있어 철거시 재해 위험이 있음.	○재해 위험이 있으므로 존치 -콘크리트옹벽(h400)철거:23M->0 -배수로(w300)철거:38M->7.5M
	○팔각정배드민턴장옆 마사토 포장 구간 연접 사면이 배수 및 식재 계획이 없어 토사유출 우려 및 미관 저해	○토사유출 우려 및 미관저해되므로 통나무 경계 설치 및 수목 일부조정하여 보완식재 -국수나무 0->150주 -자산홍 0->200주 -맥문동:0->5,510본 -통나무경계 0->10개소 -낙상홍:900주->450주 -화살나무:820주->186주
	○남산체육회 이전에 따른 부대 운동기구 이전을 남산체육회 에서 요청	- 남산체육회 운동기구 이전(25점)
	○팔각정배드민턴장의 후암배드 민턴장으로 이전에 따른 창고 신설 요청	-창고(샌드위치판넬) 신설
	○남산체육회 이전부지인 상춘 약수터에 관리소를 안전사고시 신속한 대응을 위해 4면을 유리로 된 샌드위치 판넬로 시공하여 줄 것을 요구	-관리소(콘테이너)->관리소(샌드위치 판넬)
	○남산체육회 이전부지인 상춘 약수터 주변이 나대지로 되어 있어 토사유출 우려 및 미관 저해되어 녹화 필요	○주변 수목(국수나무)과 같은 수종으로 녹화하여 재해위험 해소 및 미관 향상 -국수나무: 0주->600주 식재

3. 설계변경 금액 : 약 548,370천원(증감액: 0원)

4. 보고자 의견

- 상기 검토내용과 같이 설계변경하고자 하며 증액된 금액은 낙찰차액 및 잔액 활용하고, 향후 공사감독에 만전을 기하고자 합니다.    끝.