문서번호	정수시설과-2259
결재일자	2014.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	08/21 유성종
협 조
	주무관			변민용

물품 납품기한 연기 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

물품 납품기한 연기 보고

우리 센터에서 추진중인 『1취수장 취수펌프 제작구매 설치』 건의 납품기한이 2014.9.7.일로 되어있으나, 여름철 수돗물 사용량 폭증 및 기존펌프 12호가 수리중으로 1,2계열 2대를 동시에 교체시 예비펌프가 없으므로 부득이 납품기한을 연기하여 수돗물 사용량이 적은 시기에 설치코자 함

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 1취수장 취수펌프 제작구매 설치

○ 계약상대 : 동아기공  대표 황용완

○ 계약일자 : 2014. 4. 10

○ 납품기한 : 2014. 9. 7

○ 계약금액 : 금691,229,000원

○ 물품내역 : 모터펌프 1400kw×1대, 900kw×2대 및 주변설비 교체

□ 문제점

○ 본 계약에 의하여 교체예정인 취수펌프 3대

구 분	3, 4 계열						1, 2 계열
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호	12호
동 력 (kw)	1,400	1,400	900	900	900	450	1,400	1,400	900	900	900	450

○ 현재 1,2계열 12호가 모터수리중으로 가동이 불가한 상태로

○ 1,2계열 교체대상인 7,9호 2대를 동시에 교체시 예비펌프가 없어, 여름철 수돗물 사용량이 많은 기간에 공급 차질이 우려되므로 12호 정상가동 후 및 1대씩 순차적으로 교체하여 수돗물 사용량이 적은 10월말까지 조정할 필요가 있음.

□ 대 책

○ 물품 납품기한 연기

사 업 명	납 품 기 한		비 고
	당 초	변 경
1취수장 취수펌프 제작구매 설치	2014. 9. 7	2014. 10. 31

□ 지체상금 부과여부

○ 우리정수센터 귀책 사유로 지체상금 미부과

□ 행정 사항

○ 계약상대자로부터 협약서 징구하여 계약부서(시청 재무과)에 재계약 요청. 끝.