투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	하늘공원 노후 전망데크 정비공사 준공기한 연기

1. 시설과-4093(2014.8.20.)호와 관련입니다.

2. 『하늘공원 노후 전망데크 정비공사』에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 하늘공원 노후 전망데크 정비공사

나. 사업기간 : 2014. 7. 07. ~ 9. 04

다. 계약금액 : 83,787,000원

라. 계 약 자 : 거삼조경(주)  대표 예종서

마. 당초준공일 : 2014. 9. 04.

바. 변경준공일 : 2014. 9. 30.

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

자. 연기사유 : 현장여건에 따른 추가 공종 발생으로 절대공기 부족

붙임  1. 준공기한 연기 조치 의뢰서 1부.

2. 보고서 1부.(별송)  끝.

								시설과장
주무관							정순주				토목시설팀장					윤학수					시설과장					08/21 한성현
협조자
시행			시설과-4111										(						)		접수												(						)
우	121-850					서울특별시 마포구 월드컵로 243-60																/			http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		02)300-5535							/전송			02)300-5569					/	jsj130@seoul.go.kr													/	대시민공개