문서번호	총무과-22694
결재일자	2014.8.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	총무과장
이관호	최석기	08/22 이혜경

2014년도 청사 전기설비유지보수공사(연간단가)

설계변경(2차) 검토 보고

2014. 8.

총 무 과

2014년도 청사 전기설비유지보수공사(연간단가)

설계변경(2차) 검토 보고

2014년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행 중 당초 계약된 내역에서 물량 증․감과 신규 공종으로 인한 변경사항이 발생되어 설계변경(제2회)을 시행하고자 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 3. 3 ~ 2015. 2. 28

○ 계약금액 : 187,110,000원

○ 계 약 자 : ㈜건  산   대표  엄재룡

○ 계약내용 : 전기 및 소방설비 유지보수(315개 공종)

변경내용

○ 변경사유

- 본 공사는 시청사 전기설비에 대한 유지보수 공사를 시행하기 위해 총 315개 공종을 연간단가계약으로 체결한 공사로써

- 공사 시행 중 임차청사 전열회로 증설 「분전반(임차청사 TPS실) 설치」등 신규공종(58개 공종)이 발생됨에 따라 당초 계약물량 조정 및 신규공종 추가 계약

○ 변경금액 : 247,104,000원(증:59,994,000원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증․감	비고
총 공 사 비		187,110,000원	247,104,000원	증)59,994,000원
도급비	공 급 가 액	170,100,000원	224,640,000원	증)54,540,000원
	부가가치세	17,010,000원	22,464,000원	증)5,454,000원
	합 계	187,110,000원	247,104,000원	증)59,994,000원

○ 공사 사진

임차청사 전열회로 증설 전력간선 설치	임차청사 전열회로 증설 분전반 설치

○ 관련규정 검토

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정(지방자치단체공사계약일반조건.Ⅶ)

▸ 물량증․감 : 계약단가 적용

▸ 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율(87.747%)을 곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

- 국민건강 및 연금보험의 사후 정산

▸ 지방자치단체입찰및계약집행기준(행정안전부예규 제404호,‘12.3.22)제1장 제8절에 따른「보험료 사후 정산」

○ 증액 예산과목

▸ 행정지원체계강화, 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 시설비

조치의견

○ 잔여 공사기간 및 추가 공사에 대비하여 설계변경 증액 계약 후,

- 정산 예정액(천원)

변경금액	전회(1차) 기 성 액	금회(2차) 기 성 액	잔여물량 (공사예정)	비 고
247,104	66,044	135,289	45,771

○ 2차 기성 준공정산 시행하여 시청사 전기설비 유지보수 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 작업완료 보고서 목록 1부.

3. 작업완료 보고서(별도) 각 1부. 끝.