건설공사 설계변경 사전심의서

대시민공개

1. 공사명 : 송파동 8-2외5개소 세척갱생관 정비공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	이 덕 규
제 출 일	2014. 08. 22

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2014. 08. 22(금)

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

양상윤

08/22

代이경재

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

이경재

이경재

타당함

담    당

주무관

이덕규

이덕규

설계 변경 심의 설명서

❑ 공사현황

○ 공 사 명 : 송파동8-2외5개소 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요

- 당초 : D=20～300mm, L=1,626m

- 변경 : D=20～300mm, L=1,547m

○ 도 급 비 :

- 당초 : 233,180,610원

- 변경 : 235,543,000원(증 2,362,390원)

○ 공사기간 : 2014.04.01 ～ 2014.09.20

○ 도 급 자 : ㈜하론이앤씨   대표 최정곤

○ 감 리 자 : 서울특별시시설관리공단  조남명

❑ 설계변경 사유

○ 현장검토보고에 의한 변경사항

․ 굴착허가 및 6구간 확폭관련 검토보고

- 관련근거 : 공사감독2처-4096호, 급수운영과-5762호

․ 3구간 및 4구간 환토재 관련 검토 보고

- 관련근거 : 공사감독2처-4225호

․ 2,3,5구간의 일부구간에 대해 주간에서 야간공사로 변경 반영

- 관련근거 : 공사감독2처-6379호, 급수운영과-7557호

․ GIS도면과 상이관 확인 및 단절관 현황 검토 보고

- 관련근거 : 공사감독2처-11016호, 급수운영과-11278호

○ 기타 정산사항

- 부지임대료, 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료 정산

- 실시공 수량 정산으로 인한 물량변경

❑ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		비 고 (증·감)
	당 초	변 경
총 공 사 비	727,649,610	727,649,610	-
도 급 비	233,180,610	235,543,000	증 2,362,390
관 급 자 재 비	162,000,000	146,279,530	감 15,720,470
복구비 및 기타이설비	332,469,000	345,827,080	증 13,358,080

붙  임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 보고서 관련서류 각1부.  끝.