문서번호	시설보수과-6854
보존기간	년
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
전재형		김권일	08/22 조병준
협조

2014 관내 도로시설물 일상유지보수공사

설계변경보고서(제1회)

2014. 08.

강서도로사업소

시설보수과

설계변경 보고서(제1회)

1. 공 사 현 황

공 사 명 : 2014 관내 도로시설물 일상유지보수공사

공사규모

- 신축이음교체(130m), 균열보수(600m), 단면보수(1,500㎡),

표면보수(700㎡), 교면방수 및 포장(32a)

공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2. 28

도 급 자 : 종정종합건설(주)대표 방 은 혜

총공사비 : 1,546,766천원

(도급비:1,266,766천원,관급자재:200,000천원,이전비:80,000천원)

2. 주요 설계변경 내용

오목교 서측지하차도 아스팔트 균열보수에 따른 신규물량 발생

(홈따기후 씰링, 야간, 당초 0m → 변경 40m)

구로고가 신축이음장치 교체에 따른 신규물량 발생

(New F/J A-Type(80#),b=45cm, T=15mm, 야간

당초 0m → 변경 39.2m)

신월IC 상판보수공사에 따른 신규물량 발생

(Con.c 300- 교량-초속경, 야간 : 당초 0㎡ → 변경 217.5㎡)

오류철도고가 강재 재도장에 따른 신규물량 발생

(주간, 철재면, 조합페인트 2회,0㎡ → 변경 51.87㎡)                 신월IC하부 배수로 정비에 따른 신규물량 발생

강관배관,STS D150, 야간 (당초 0m → 변경 108m)

개봉고가 차량통과높이 제한시설 설치에 따른 신규물량 발생(1개소)

구로고가 기존 조류방지망 제거 및 설치에 따른 신규 물량 발생

(조류방지망 철거 720㎡, 설치 130.2㎡)

가리봉철도고가 보도용 난간보수에 따른 신규물량 발생

(SK-A102, 주간, 당초 0 → 10m)

양화교 교량 난간살 및 오금교 난간캡 보수등 경미한 신규물량 발생

기타 금액 조정에 따른 물량 증감

3. 공사비 변경내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비고
총 공사비	1,546,766,000	1,546,766,000	변동없음
도 급 비	1,266,766,000	1,266,766,000	〃
관 급 비	200,000,000	200,000,000	〃
이 전 비	80,000,000	80,000,000	〃

4. 조치 의견

상기 내용과 같이 설계변경하고 도급자로 하여금 재계약토록 지시코자

합니다.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부.