문서번호	토목부-16334
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박천용		최광무	08/22 노우성
협조

- 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 -

시점부 우수관로 추가 설치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

서울특별시도시기반시설본부

( 토 목 부)

- 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 -

시점부 우수관로 추가 설치 검토 보고

서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 추진중 시점부 우수관로 추가설치 실정  보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 시점부 우수관로 추가설치 실정보고[서지(감) 제14-397호(‘14.08.20.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사

○ 공사규모 : 도로구조개선 L=1.35Km

지하차도 L=1,075m(BOX 740m, U-TYPE 335m)

○ 공사기간 : 2008.03.10 ∼ 2014.08.29.

○ 공 사 비 : 금 820억원(공사비 772, 기타 48)

○ 시 공 사 : 중앙건설(주)외 1개사

□ 감리단 검토

○ 검토내용

- 현 황

∙ 시점부 우측 기존 우수관로(Φ600㎜)의 노후화(1983년 설치) 및 연결부 파손, 균열으로 인하여 배수처리가 아려워 우수관로의 교체 신설(L=45m)이 필요하며,

∙ 보도공사 계획변경 등으로 시점부 좌우측 차도 및 벽산아파트옆 이면도로 구간에서 원활한 배수처리가 이루어지도록 맨홀(2개소), 빗물받이(6개소), 연결관(L=43m)의 추가 시공이 필요함.

∙ 서부트럭터미널 앞 녹지대 내에 체수방지 및 원활한 배수처리를 위하여 U형플륨관(200*200) 신설(L=80m)이 필요함.

- 시점부 및 서부트럭앞 현황도(H=1.8m ~ 0.6m, L=12.5m)

∙ 시 점 부

∙ 벽산아파트 옆 이면도로

∙ 서부트럭터미널앞 녹지대 구간

- 공사비 증감 현황

공 종	당 초	변 경	증, (감)	비 고
배 수 공	-	9,329,934	9,329,934
운 반 공	-	2,476,157	2,476,157
직 접 공 사 비	-	11,806,091	11,806,091
제 경 비	-	2,481,182	2,481,182
물가변동금액	-	1,059,091	1,059,091
공 급 가 액	-	15,346,364	15,346,364
부 가 세	-	1,534,636	1,534,636
도 급 액	-	16,881,000	16,881,000

○ 검토의견

- 위 와 같이 시점부 우측 기존 우수관로(Φ600㎜)의 노후화(1983년 설치) 및 연결부 파손, 균열으로 인하여 배수처리가 아려워 우수관로의 교체 신설이 필요하며,

- 보도공사 계획변경 등으로 시점부 좌우측 차도 및 벽산아파트옆 이면도로 구간에 원활한 배수처리가 이루어지도록 맨홀, 빗물받이, 연결관의 추가 시공이 필요하며,

- 서부트럭터미널 앞 녹지대 내에 체수방지 및 원활한 배수처리를 위하여 U형플륨관(200*200)을 신설 하는것이 타당하다고 사료되오며, 추후 설계 변경시 반영하고자함.

□ 공사시행 협의

○ 우리시 : 신규비목 낙찰율 70.849% 적용.

○ 도급자 : 신규비목은 자재비의 비중이 큰 부분으로서 공사시행에 어려움이 많아 설계가의 100% 적용

□ 조치의견

○ 상기 감리원 검토의견과 같이 승인하고 설계변경시 반영토록 업무지시 하고자 함.

○ 금회 실정보고건은 공사 시행 협의 하였으나 협의 되지않아 신규공종에 대해 공사계약일반조건 제20조 2항에 따라 강제 협의율 85.424% 적용코자 함.

붙 임 : 1. 감리원 실정보고 1부.  끝.