투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	경의선숲길 및 경춘선 폐선부지 공원화사업 공정만회 요청

1. 관련근거

- 방재시설부-2351(2014.4.29.) 건설공사 감리업무 및 시공관리 철저

- 방재시설부-6217(2014.7.15.) 경의선 및 경춘선 공원화사업 공정관리 철저

2. 평소 시정발전을 위해 협조하여 주신 귀 사께 감사드립니다.

3. 귀 사와 계약 체결하여 추진 중인 『경의선숲길 공원조성공사(2단계)』 및 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)』는 그동안 보완설계와 시공이 동시에 진행되었고, 최근 ‘14.7.29. 최종설계(민원사항포함)가 완료된 바 있으며, 현재 2개공사 1차분 준공(‘14.12.20.예정)과 정상적인 공정 만회를 위하여 귀 사의 인적, 재정적 지원뿐만 아니라 공사관련(하도급, 시공관리 등) 모든 의사결정이 빠르게 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 이와 관련하여 책임건설사업관리기술자(책임감리원) 및 책임건설기술자(현장대리인)는 지역주민 민원 및 관련예산(익년도 이월불가)상 준공기한(‘14.12.20.예정)내 사업이 완료될 수 있는 방안(현장여건에 맞는 비상근무체제 등)을 수립 시행하시기 바랍니다.

○ 정상공정까지 부득이한 경우를 제외한 연가 및 현장이탈 제한(공통)

○ 긴 선형의 공사구간별 선․후행 공사간 세밀한 공정관리 철저(공통)

○ 공사구간별 전체 공정관리(수정공정 포함) 주간 단위 점검확행(시공사, 감리단)

○ 월간공정 10%이상(누계 5%)지연시 부진사유 분석, 만회대책 및 만회공정표 수립, 검토 확인(시공사, 감리단)

- 긴 선형현장임을 감안 만회공정을 위하여 공사구간별 작업방안 강구

- 토요일 등 공휴일 지속적인 시공방안(작업팀 추가포함) 검토

○ 실정보고사항(설계변경도서, 자문 등 포함) 신속 작성(시공사)

○ 분야별 하도급관리(만회/후속/수정공정 등 추진) 철저(시공사)

○ 분야별 시공사항 이견 발생시 당일 책임있는 의사결정(책임감리원)

○ 2개현장 통합감리에 따른 검측업무(분담,방법 등) 확립(책임감리원)

○ 공사구간별 금일 및 후속(간섭) 공정 점검후 1일 보고(책임감리원).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	한일개발(주) 대표이사 귀하,우보건설(주) 대표이사 귀하,SK임업(주) 대표이사 귀하,(주)승일토건 대표이사 귀하,(주)유신 대표이사 귀하,경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하,경의선숲길 공원조성공사 책임건설기술자(현장대리인) 귀하,경춘선 폐선부지 공원조성공사 책임건설기술자(현장대리인) 귀하
주무관	강종희		공원시설과장	정일환		방재시설부장	08/22 임춘근
협조자	주무관	전지홍		주무관	박계현
시행	방재시설부-7984	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길15 별관2동 2층 방재시설부	/
전화	02-3708-8732	/전송	02-3708-8756	/	park918@seoul.go.kr	/	대시민공개