문서번호	도시철도설비부-7793
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
이재구		강재천	08/22 정찬웅
협 조
	송변전과장			김형기
	정보통신과장			이용기
	신호과장			김영하

2014년 3/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질관리 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  8.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

2014년 3/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질관리 점검계획

지하철 9호선2단계 설비분야 건설공사 진행사항과 현장시공 상태에 대한 점검을 실시하여 시공품질 향상에 만전을 기하고자 함

	관련근거

1

○ 건설기술관리법 제24조(건설공사의 품질관리)

○ 건설기술관리법 시행령 제78조/83조(품질관리의 지도･감독/확인절차)

○ 건설기술관리법 시행규칙 제42조(품질관리의 적정성 확인)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조/42조(감독/평가)

	점검계획

2

□ 점검기간

○ 2014. 9. 15(월)~9. 26(금)

□ 점검대상

○ 9호선2단계 건설공사 구간(현재 진행중인 설비분야 공사)

- 서울지하철 9호선2단계 915~917공구 건설공사(기계, 전기분야)

- 서울지하철 9호선2단계 신호보안설비공사

- 서울지하철 9호선2단계 정보통신설비공사

- 서울지하철 9호선2단계 송변전공사

- 서울지하철 9호선2단계 전차선공사

□ 점검분야

○ 송변전･전차선, 정거장 전기, 기계설비, 통신･AFC, 신호 : 5개 분야

(차량분야 제외 : 도시철도법에 따라 한국철도기술연구원 주관 성능시험)

□ 점검반 편성

○ 분야별 담당과장 및 담당주무관(자체점검)

→ 분야별 담당자간 교차점검(공구담당 입회)

○ 감리원 및 건설기술자는 점검시 입회

※ 점검반 편성 검토

○ 점검계획 : 외부전문가 2회/년, 자체직원 2회/년

○ 2분기 에 외부전문가 점검 했으므로 금번 3분기는 자체점검

- 2014년 8월 현재 추진공정

분야별	송변전･전차선	정거장전기	기계설비	정보통신	신호
공정율	100%	85~89%	82~86%	100%	98%

○ 4분기 점검은 외부전문가 점검 예정

□ 점검방법

○ 각 분야별 담당과장 책임하에 점검

(분야별 담당자 수행 및 감리원․시공사 입회)

○ 분야별 품질관리상태 및 시공의 적정성 여부, 안전관리 등 중점점검

○ 품질관리실태점검표(별첨)에 관리상태 및 시행적정성 등 확인

○ 공사 진행에 지장이 없도록 동일 현장은 가급적 각 분야 동시점검

□ 중점 점검사항

○ 품질관리 상태 중점 점검

○ 관련규정에 따른 기술지도, 교육사항

○ 품질관리 및 안전관리 계획 준수여부

○ 각종 장비 및 자재 관리상태

○ 시공 및 가동의 적정성 여부

○ 공정관리 실태 및 품질향상을 위한 시공방법 개선 등 조치사항

○ 기타 시민불편사항, 수범사례 등

○ 2/4분기 점검 지적사항 조치결과 및 진행사항

	점검결과 조치

3

○ 시공품질관리 상태 등 부적합 사항

- 현지시정 및 감리단에 통보하여 시정 후 보고 하도록 조치

- 부실시공, 품질관리 부적정 등 지적사례는 재발방지를 위해 각 현장에 전파 및 향후 교육자료로 활용

○ 지적사항은 분야별 공사관리관이 지속적 관리

- 각 공구별 지적사항 관리 및 시정여부 확인 조치

○ 점검결과 제출(설비계획과 수합)

- 각 과에서는 점검표 및 점검결과 보고서를 ‘14.9.29(월)까지 제출

- 점검결과 지적사항에 대한 근거자료 및 사진 첨부

별첨 : 1. 품질관리 실태 점검표(점검자 작성용) 1부.

2. 품질관리 실태 점검결과 보고서(감리단･시공사 작성용) 1부. 끝.