문서번호	기전과-7900
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	북부도로사업소장
백윤광		정윤식	08/25 이승진
협 조
	관리단속과장			정수현
	주무관			박경우
	주무관			박신범

『2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

2014. 8

북부도로사업소

(기전과)

『2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사』

설계변경(정산) 검토 보고

우리 사업소에서 추진중인 교통신호기공사의 물량 변경 및 수수료 등 정산에    따른 책임감리사의 설계변경서류가 접수되어 이를 검토하고 추진계획을 보고함

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사(긴급)

○ 공사기간 : 2013. 11. 6 ~ 2014. 8. 31

○ 계약금액 : 금133,930,000원

○ 시공업체 : ㈜경신전기 대표 김경택

○ 공사위치 : 종로구 청계4가 외 8개소

▢ 설계변경 추진내용

○ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증ㆍ감	비 고
예산총계		144,105,000	144,105,000	-	-
계		133,930,000	141,900,000	7,970,000(증)	-
도급비	공사원가	121,754,546	129,000,000	7,245,454(증)	-
	부가가치세	12,175,454	12,900,000	724,546(증)	-
이 전 비		10,175,000	2,205,000	7,970,000(감)	-

○ 설계변경 사유

- 당초 설계도서(내역서/도면)과 시공현장 여건, 관할기관의 추가요청 공사에 따라 물량 증감이 발생하고 안전검사 수수료 등의 정산 필요

○ 예산과목 : - 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화,

도로교통소통개선, 시설비(도로교통소통개선사업)

- 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리,

보행불편해소를위한횡단보도확충정비,시설비(횡단보도확충정비사업)

- 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 교통약자이동편의증진,

노인․장애인보호구역개선, 시설비(노인보호구역개선사업)

▢ 검토의견

○ 상기 변경사유와 같이 현장여건 및 유관기관의 추가공사 요청에 따라 물량변경  발생과 전기안전검사 수수료 등 이전비를 반영한 사항으로

○ 감리사로부터 접수된 설계변경 서류를 검토한 결과 타당하여 설계변경 추진하고자 함

붙임 : 1. 설계변경검토서(감리사) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증대장 1부.  끝.