문서번호	주차계획과-11146
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
임종민		김종상	08/25 안석진
협조

- 잠실역 환승주차장 변경공사 -

시설물 인수 및 책임감리 준공 검토보고

2014. 8.

도시교통본부

주차계획과

시설물 인수 및 감리용역 준공 검토보고

(잠실역 환승주차장 변경공사 전면책임감리용역)

잠실역 환승주차장 변경공사가 2014.7.31. 완료됨에 따라 시설물 인수 및 전면책임감리용역 준공처리에 대한 검토보고임

□ 관련근거 : 협약서(서울시-시설관리공단-롯데물산외2)

제9조(책임감리에 대한 검수)

책임감리는 ‘시’의 승인 완료 후에 준공처리한다

제11조(시설물의 귀속, 인계, 인수)

①‘시행자’는 본 사업을 완료하고 준공하는 대로 시설물과 그 부속하는 일체를        ‘시’에게 무상귀속 조치한다.

②‘시행자’는 사업의 완료와 동시에‘시’,‘공단’에게 이 사실을 통지하고 인계,          인수 절차에 따라 ‘시’,‘공단’에게 인계한다.

□ 감리용역 현황

○ 용 역 명 : 잠실역 환승주차장 변경공사 전면책임감리용역

○ 공사내용 : 주차장 시설결정 면적 8,809㎡(변경 1,410㎡)

- 주차장 진입로 92.6m 이설 및 진출로 43.8m 이설

- 기타 주차장 리모델링 공사 등

○ 용역기간 : 2013.6.1. ~ 2014.7.31.

○ 용역금액 : 482,900천원

○ 용 역 사 : ㈜삼보기술단 대표 이창윤

□ 시설물 인수ㆍ인계 검토

○ 시설물 준공 현황

-‘14.5.30 : 우리시 공사준공 승인 통보

-‘14.7.31 : 송파구 도시계획시설(주차장)사업 공사완료 공고 및 준공검사필증 교부

○ 시설물 인수ㆍ인계내역

- 준공된 진입램프, 진출램프, 에스컬레이터, 장애인 리프트 등(별첨1참고)

○ 조치계획

- 시행자측으로부터 제출된 「시설물 인수ㆍ인계증서」 날인ㆍ교환

- 진입램프 중 일부 롯데부지측에 걸치는 부분에 대해서는 구분지상권 설정계약

□ 감리용역 기성청구내역 검토

○ 기성 청구금액(제4회)                                             (단위 : 천원)

구분	계약금액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	누계 기성액	비고
용역비	482,900	401,500	59,400	460,900

○ 기성 산출내역 검토 결과

- 감리기간 산정 적정 : 2.0개월 적용(2014.6.1. ~ 2014.7.31.)

- 투입인원 확인 및 기타 산출내역 적정(기성율 95.44%)

○ 조치계획

- 산출내역 검토결과 적정하므로 사업시행자에게 기성청구내역(제4회) 승인 통보

- 시설물 공사 준공 및 인수ㆍ인계 완료됨에 따라 전면 책임감리용역 준공처리 통보

붙임 : 1. 시설물 인수인계 내역

2. 구분지상권 설정계약

3. 감리용역 기성청구내역.  끝.