보고서(급수공사준공연기)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
양윤선	김태형	08/25 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-20621

「광진구 상수도공사」 감독업무 수행 중 아래와 같은 상황이 발생하여 보고합니다.

2014. 8. 25.

*****************************

제목 : 급수공사 준공 연기

□ 현   황

○ 공사명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 위  치 : **************

○ 계약자 : ***************

○ 작업지시 번호 : 신설148

○ 공사기간 : 2014.08.14.~2014.08.25.

□ 보고내용 및 조치의견

○ 위의 공사는 2014.08.25까지이나 수도공사 장소에 자재가 적치되어 있고, 수요가의 원에 의거 공사기간 변경요청이 있어 준공기간 연기 요청서가 제출된 바, 아래와 같이 준공기간을 연기하여 신뢰받는 상수도 행정에 기여하고자 합니다.

- 당초 공사기간 : 2014.08.14.~2014.08.25.

- 변경 공사기간 : 2014.08.14.~2014.09.03.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

따로붙임 : 급수공사 작업기한 연기요청서 1부(별첨).  끝.