업 무 지 시 부

연 번		지시일자	2014.8.25.
수 신	지하철917공구 책임감리원
참 조
제 목	준공기한 연기요청 보완건 검토요청
지시내용	1. GS건설 GS건917-2014-472호(2014.08.25)와 관련입니다. 2. 위 호와 관련 시공사로부터 준공기한 연기사유를 아래와 같이 보완하여 연기요청이 있어 검토지시하니 2014.08.26일한 의견을 제출하여 주시기 바랍니다. 가. 시공사 연기요청 사유 - 하수도 설계빈도 변경(5년→10년)에 따른 수리검토 및 조정설계 기간소요 - 2호선 종합운동장역 개보수 및 #8번 출입구 공사 협의시 농구 및 야구시즌을 피하여 공사요구에 따른 소요기간 첨부 관련공문 및 공정표 1부. 끝.

지시자:		황왕연	(인)
수령자:			(인)

				서울특별시도시기반시설본부장
주무관			황왕연			토목1과장				08/25 김성호
협조자
시행	도시철도토목부-9302						(				)