문서번호	도로보수과-4894
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
김종범		손수희	08/25 송상영
협조

설계변경(3회) 검토보고

(관내포장도로 불량맨홀정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

동부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(3회) 검토

관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

우리 사업소에서 시행중인 『관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 서울시시설관리공단으로부터 설계변경(3회) 보고가 있어 이에 대한 검토 보고임

관련근거 : 시설관리공단 공사감독1처-7651호(‘14. 8. 22)

1		공사 개요

공 사 명 : 관내포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

공사기간 : 2014.3.21 ~ 2015.2.28

공사개요 : 불량맨홀 정비 692개소(주간 351개소, 야간 341개소)

도 급 비 : 594백만원

도 급 자 : 태평림건설㈜ 대표 이동균

2		보고 내용

설계변경 사유

o 맨홀 관리기관 공종별 시공 물량 증, 감

주요 변경내용

o 불량맨홀 정비(주간) : 당초 351개소, 변경 325개소

o 불량맨홀 정비(야간) : 당초 341개소, 변경 337개소

공사비 변경

o 변경사항 없음

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고(증·감)
총 공사비		600,000,000	600,000,000	-
도급비	공급가액	540,033,637	540,033,637	-
	부가가치세	54,003,363	54,003,363	-
	계	594,037,000	594,037,000	-
폐기물 처리비		5,963,000	5,963,000	-

3		검토 및 조치의견

상기 설계변경 내용이 적정하므로 설계변경 시행후 변경계약 시행코자 합니다.

따로붙임 : 1. 서울시시설관리공단 공문 1부

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.