투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수색4재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기간 연기 승인 통보(수색4재정비)

1. 수색4-21-123(2021.9.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 요청하신 공사기간 연장 요청에 대해 아래와 같이 공사기간을 연기 승인 통보합니다.

가. 공 사 명 : 수색4구역 정비기반시설 교통안전 원인자부담공사(노면표시)

나. 공사위치 : 은평구 수색동 361-10 일대(수색4구역 재개발 현장)

다. 공사기간

- 당 초 : 승인일로 부터 ~ 2021.10.31.

- 변 경 : 승인일로 부터 ~ 2021.12.31.

라. 연기사유 : 토목공사 지연(아스콘 수급지연 등)에 따른 절대공기 부족

바. 공사내역

공 사 내 역	관 련 업 체			원 인 자	비고
	설 계	감 리	시 공
노면표시 도색 및 제거	******	********	***	*********************	-

붙임 원인자 부담공사 기간연장 요청 건 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	김영민		도로보수과장			도로보수과장	전결 10/01 代이이용
협조자
시행	도로보수과-9282	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 본관 3층 (상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8357	/전송	02-300-8365	/	kym6347@seoul.go.kr	/	부분공개(6)