문서번호	시설과-5678
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
박현주	고봉채	임종훈		10/01 이용우
협 조

- 서서울호수공원 무장애친화공원 조성사업 - 설계변경 검토 보고

2021. 9.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

- 서서울호수공원 무장애친화공원 조성사업 - 설계변경 검토 보고

『서서울호수공원 무장애친화공원 조성사업』시행 중 현장여건 및 시설물 정비 추가 물량 발생에 따른 설계 변경사항이 발생하여 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서서울호수공원 무장애친화공원 조성사업

□ 공사기간 : 2021. 8. 16. ~ 10. 4.

□ 주요내용

- 안내판 교체 및 점자블록 설치, 포켓쉼터 조성

- 음수대교체 및 주변 개선, 데크 및 산책로 경사턱 낮춤

- 데크 개선 및 안전난간 설치, 그레이팅 덮개 정비

□ 도 급 액 : 금89,145,600원

□ 시 공 사 : ㈜루트스포츠 대표 윤한진

Ⅱ		설계변경 검토내용

<실정보고사항 검토내용 관련 : 시설과-4966(2021.9.2.)>

○ 장애인 전통휠체어전용 충전소 안내판 및 주차선 도색 검토 반영

○ 수경시설 주변 산책로 일부 나대지 발생에 따른 수목 보식 검토 반영

○ 안내소 옆 전동휠체어 충전소 입구 주변 경사로 턱낮춤 검토 반영

<현장여건 추가 변경사항 관련>

○ 물놀이장 주변 바닥포장 침수 및 배수불량으로 정비가 시급하여 당초 화강석판석포장 위치를 변경하여 배수로 설치 및 포장 변경 반영

○ 재생정원 입구, 포켓쉼터 주변, 정문입구 안내판 철거 지역 등 시설물 주변 나대지 잔디 등 보식으로 산책로 토사유출 방지 식재 반영

< 현황사진 >

물놀이터 주변 배수로 신규 설치 및 포장	재생정원 주변 나대지 발생 지역
정문입구 안내판 철거 뒤 추가 식재 지역	포켓쉼터 주변 나대지 발생 지역

○ 공종별 변경내용

구 분	공 종 명	변 동 물 량	사 유
시설물 공사	배수관(∮50,PVC)	0 → 4m	물놀이터 주변 침수 및 배수불량에 따른 배수로 신규 설치 물량 반영
	측구수로관 (W200,중하중그레이팅)	0 → 5m
	전동휠체어충전안내판 (500×500)	0 → 2개소	전동휠체어 충전소 안내판 및 주차선 라인마킹 신규 설치 물량 반영
	주차선 라인마킹	0 → 1식
포장 공사	화강석판석 포장A(T30)	27㎡ → 31㎡	안내소 주변 경사로 턱낮춤 등 현장여건에 따른 판석 및 경계석 추가 물량 반영
	화강석판석 포장B(T30)	130㎡ → 138.2㎡
	화강석경계A (150×150×1000)	5m → 28.5m
	화강석경계B (250×250×1000)	44m → 50m

구 분	공 종 명	변 동 물 량	사 유
식재 공사	자산홍(H03.×W0.3)	0 → 200주	안내판 철거 및 포켓쉼터 조성 주변 나대지 발생에 따른 토사유출 방지 식재 물량 반영
	잔디(40×60×2)	0 → 80.5㎡
철거공사	화강석판석포장-광장	35㎡ → 39㎡	안내소 주변 경사로 턱낮춤 등 현장여건에 따른 철거 물량 조정 반영
	화강석판석포장 철거	44㎡ → 42㎡
관급자재	촉지안내판(부착형)	1개소 → 0	전기함 일체형 안내판(벽부형)으로 변경(음성안내기포함) : 기 변경시행
	촉지안내판(벽부형)	0 → 1개소
	전동휠체어 충전기	2개소 → 0	전기공사 관급자재로 포함하여 분리발주 시행
제경비	건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비 등	3,187,104원 → 0	미사용 사회보험료 및 환경보전비 등 정산

Ⅲ		변 경 금 액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	81,041,455	86,963,636	증 5,922,181
	부 가 세	8,104,145	8,696,364	증 592,219
	도급비계	89,145,600	95,660,000	증 6,514,400
관 급 자 재		39,890,950	34,407,470	감 5,483,480
총 공 사 비		129,036,550	130,067,470	증 1,030,920

※ 세부내역 : 따로붙임

Ⅳ		검 토 의 견

□ 현장여건 및 민원사항 발생에 따른 정비 물량을 추가 반영한 변경사항이므로 부족분은 낙찰차액을 활용하여 상기와 같이 설계변경하여 시공코자 함

붙임  1. 실정보고사항 검토보고 1부.

2. 설계변경내역서 및 제비율검증자료 각1부.  끝.