함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(송파동8-2외5개소 세척갱생관 정비공사)

우리사업소에서 시행하고 시설관리공단에서 위탁감독한 아래 공사의 설계변경 심의회를 개최하고 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 송파동 8-2외5개소 세척갱생관 정비공사

나. 도 급 자 : ㈜하론이앤씨  대표 최정곤

다. 공사기간 : 2014.04.01 ~ 2014.09.20

라. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(세척갱생관정비)21103000

마. 변경사유 : 신공종 및 계약물량 증·감사항 발생

바. 변경내역

(단위: 원)

구 분	금 액		증·감	비 고
	당 초	변 경
도 급 비	233,180,610	235,543,000	증) 2,362,390

붙  임  1. 설계변경 사전심의 결과서 1부.

2. 설계변경내역서 및 관련서류 각1부.

3. 원가계산제비율검증표 1부.  끝.

주무관	이덕규		주무관	이경재		급수운영과장	代이경재		강동수도사업소장	08/25 원응연
협조자	주무관	한호진		주무관	안남호
시행	급수운영과-13686	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개