투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장
(경유)	인천지역본부장
제목	도로공사 주요 공정 알림(남부순환로~오정대로간)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 인천본(운)76208-1890호(2014. 7.25)와 관련입니다.

3. 위 호로 한전선로(154kv) 이설공사를 위해 협조 요청하신 “남부순환로~오정대로간 도로개설공사” 구간중 부천시(가족길) 구간의 도로공사(교량 신설) 주요일정을 아래와 같이 알려드리니 공정관리에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

나. 위    치 : 강서구 방화로 ~ 부천시 오정대로 삼거리

다. 사업개요 : 도로개설 폭40m(8차로), 연장1,230m

라. 공사기간 : 2010. 9 ~ 2014.12.31.(2015.12월로 연기예정)

마. 지연사유 : 토지 등 손실 보상 협의 지연(중토위 수용재결 중)

바. 주요 공정의 추진 일정

- ′14. 8. : 부천시구간 토지 보상 중 (6개월 소요)

- ′15. 3. : 가족길 교량공사 착공 예정 (소요공기 : 8개월)

※ 상기 공정 변경(용지보상 및 현장여건 등)시 사전 통지 예정

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		광역도로과장	최광무		토목부장	전결 08/25 노우성
협조자
시행	토목부-16420	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개