문서번호	전시과-1832
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전시과장	학예연구부장		서울역사박물관장
조선경	김양균	박현욱		10/05 김용석
협 조	경영지원부장		代김춘섭
	총무과장		김춘섭
	시설과장		최병석
	교육대외협력과장		代오지영
	유물관리과장		강성희
	보존과학과장		강성희

상설전시실 2·3·4존 개편공사에 따른 폐실 계획(안)

2021. 10.

서울역사박물관

(전시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

상설전시실 2·3·4존 개편공사에 따른 폐실 계획(안)

상설전시실 2·3·4존 개편공사를 추진함에 따라 해당 전시실을 임시 폐실하고자 함. 이에 관람객 및 대내·외 기관들의 방문 일정에 차질이 없도록 사전 홍보 및 대비를 철저히 함으로써 관람서비스에 만전을 기하고자 함

1		추진배경

○ <상설전시실 노후 진열장 및 콘텐츠 개선> 사업의 일환으로 2020년 상설전시실

1존 개편 완료에 이어 2021~22년 2·3·4존 개편 공사 추진

○ 박물관 개관20주년 대비 상설 전시시설 및 콘텐츠 개편을 통한 관람 안전,

관람객 만족도 등 제고

2		관련근거

○ 상설전시실 2·3·4존 진열장 및 콘텐츠 개편 계획(전시과-322, 2021.2.24.)

○ 상설전시실 2·3·4존 개편 세부 추진 계획(전시과-1295, 2021.7.15)

3		2·3·4존 개편 사업개요

○ 사 업 명 : 상설전시실 2·3·4존 개편 전시연출물 제작 설치 용역

○ 사업예산 : 1,836,000천원

※ 장기계속계약: 1차(2021년) 642백만원 / 2차(2022년) 1,194백만원

○ 사업기간 : 2021. 10 ~ 2022. 6.17

○ 사업내용 : 상설전시실 2·3·4존 노후 진열장, 전시시설 철거, 전시유물 반납 및

신규 진열장, 전시연출물 등 제작 설치 공사

○ 폐쇄장소 : 상설전시실 2·3·4존(2,110㎡) 및 전시실 외부 출입구

○ 폐쇄기간 : 2021. 11. 1.(월) ~ 2022. 5. 19.(목)

※ 재개관 : 2022. 5. 20(금)(예정)

<상설전시실(3층) 폐쇄 구역>

4		2·3·4존 폐실 세부 추진계획

□ 추진방향

○ 상설전시 연계 프로그램의 예약 및 이용에 차질이 없도록 사전 홍보 철저

○ 상설 1존 <조선시대의 서울>은 정상 운영되므로 각 부서별 연계 프로그램 운영

정상 추진 안내 철저

○ 전시공사를 위한 사전준비를 철저히 하여 공사 추진 시 소음, 진동, 분진 등으로 인한

관람객 이용 불편 최소화 및 안전사고 사전예방

- 공사 가림막 설치, 자재 이동 경로 보양 및 안전 가드라인 설치 등

○ 폐실 기간 중 현장 홍보물 설치를 통해 박물관 이용안내를 실시하고, 관람객

및 근무자 안전 철저히 대비

○ 상설 2·3·4존 폐실 관련 박물관 홈페이지, 홍보물 등 온・오프라인 매체 홍보

□ 전시실 폐실 홍보계획

○ 홍보대상

- (국내·외 유관기관) 서울시 및 자치구, 국공립·사립 박물관·미술관, 단체 관람객 관련 인바운드 회사 등

- (교육 및 관람 단체기관) 서울시 교육청 및 학교, 유치원, 어린이집, 교육 관련 유관기관 등

○ 홍보방법

- (온라인 홍보) 박물관 홈페이지 공지, 서울시 및 박물관 홈페이지 회원 메일링 서비스, SNS 활용 홍보 등

- (오프라인 홍보) 현장 안내 배너 및 사인물 제작 설치

□ 박물관 전시 및 시설 운영

○ 상설전시실 1존 및 기획전시실, 기증전시실, 교육실, 자료실 등 정상 운영

○ 상설전시실 2·3·4존 공사구역(출입구, 자재 이동경로 포함)과 정상운영 구역 간

안전가림막 및 안내사인물 설치, 통로 확보 등 박물관 이용객 및 근무자 안전

관리 철저

○ 기타 유물이동, 폐기물 반출, 자재 반입 등 박물관 운영시간을 감안하여 탄력적 실시

□ 부서별 협조사항

○ 총 무 과 - 관람예약 및 이용 변경사항 안내, 관람객 안전안내 및 홍보

- 홈페이지, 박물관 전광판 홍보이미지 표출 협조

- 영상미디어 기기 및 부품 철거 작업 협조

○ 교육대외협력과 - 박물관 회원 메일링 서비스 등 홍보 지원

- 교육프로그램 연계 기관 대외 홍보 지원

○ 유 물 관 리 과 - 공사기간 중 전시유물 수장고 반납 및 재대출 협조

○ 보 존 과 학 과 - 전시유물 보존처리 협조

○ 시   설   과 - 전시실 개편에 따른 건축·소방·전기·기계·통신설비

이설·철거 등 지원

5		추진일정

○ ’21. 10. 1 ~ 29      상설 2·3·4존 폐실 및 홍보 계획 수립

대내·외 온·오프라인 홍보 추진

각 부서별 폐실 관련 업무 협조 알림

○ ’21. 11.1 ~ 12       전시유물 포장 및 수장고 반납

○ ’21. 11.15 ~ 12.31   전시시설 및 전시물 철거, 실시설계

○ ’22. 1. ~ 4.           전시시설 공사 및 전시물 제작 설치

○ ’22. 5.1 ~ 5.19       전시유물 재대출 및 진열 작업

○ ’22. 5.20               상설 2·3·4존 재개관

○ ’22. 5.23 ~ 6.17      전시시설 시범운영 및 준공.   끝.