문서번호	청소년정책과-16412
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장		평생교육국장
양영지	김석기	고석영		10/05 이대현
협 조

양천 음악창작센터 총사업비 증액 등 검토 보고

2021.10.

평생교육국

(청소년정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

양천 음악창작센터 총사업비 증액 등 검토 보고

음악창작센터 건립을 위해, 사업실행 부서의 총사업비 증액 요청[도시기반시설본부-15533(2021.9.29.)]에 대한 검토 보고

□ 사업개요

○ 위    치 : 양천구 신정동 1290-6외 4필지(1,935.8㎥)

○ 규    모 : 지하1층/ 지상6층, 연면적 5,410㎡

○ 사업기간 : '17. 1 ~ '22. 4.

○ 총사업비 : 금21,669백만원

□ 추진경과

○ '17.01.09  : 시립청소년음악창작센터 건립 운영 기본계획 수립

○ '17.08.18  : 중앙투자심사(조건부)

○ '17.12.15  : 시의회 공유재산관리계획(원안가결)

○ '17.12.21  : 도시계획시설(청소년수련시설) 결정

○ '18.01.09  : 건축사업 적정성 사전검토 결과 통보(도시기반시설본부)

○ '18.03.16   : 사업비․사업기간 검토 및 세부추진계획 수립

- 사업비(168억→182억, 증 14) 및 사업기간( ’20.12→ ‘22. 4, 증 16개월)조정

○ '18. 3~12 : 설계공모(도시공간개선단) 및 설계용역

○ ’18.12.27 ~ ’20. 1.17 : 건축 설계 용역(설계자:신한종합건축사사무소)

○ ’19.10.22  : 총사업비 증액(건설공사비 지수 상승률, 음향․무대 등 공사비 증액)

- 사 업 비 : 당초 18,286백만원, 변경 21,669백만원

○ ’20.4.27 ~ : 공사 착공(시공:샘코건설(주), 감리:종합건축사사무소 근정)

□ 변경사항

**********************************************

○ 사업비 증액 : ****************************

(단위 : 백만원)

***		***	***	***	***
**		******	******	******
*****	***	******	******	****	******** ********* ****************
	*****	*****	*****	****	**********
*******		*****	****7	****	*************************
*****		**	**	**

※ ‘22년 세출예산요구서 제출 시 사업비 증액분 기반영 제출

*****************************

○ 공기변경 및 증액 사유

*************************************************************

**************************************

************************

***********************************************************************

□ 검토결과 : **

********************************************************************

□ 향후일정

**************************  끝.