투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1차) 시행[2014년 교통안전시설 유지보수 공사(안전표지)]

1. 기전과-7738호(2014.08.20)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진중인『2014년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)』에 대해 설계변경(제1차)코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 04. 07 ~ 2015. 02. 28

다. 시공업체 : 고려유리(주) 대표 김준기

라. 공사금액 : 금78,145,970원

마. 설계변경 내용

○설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	78,145,970	78,145,970	0
공 급 가 액	71,041,791	71,041,791	0
부가가치세	7,104,179	7,104,179	0

○설계변경사유 : 당초 작업 예정물량을 산출하여 사업을 추진하는 연간단가 특성상 작업지시에 따른 물량의 증ㆍ감 발생

바. 예산과목 : 도시교통체계및소통개선,교통안전시설물관리,교통사업특별회계,교통안전표지설치및개선,시설비

붙임 : 1.	설계변경(제1회) 방침서 1부.

2. 감리사 설계변경 문서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	강운규		기전과장	08/25 정윤식
협조자	주무관	박경우		관리단속과장	代이강용
시행	기전과-7879	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	944-5477	/전송	945-5074	/	wgkang@seoul.go.kr	/	대시민공개