문서번호	토목부-18577
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	10/05 임춘근
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

조경분야 건설사업관리기술인 적정투입일수 실정보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

조경분야 건설사업관리기술인 적정투입일수 실정보고

본 공사와 관련하여 협업하고 있는 방재시설부에서 조경분야 건설사업관리 기술인 적정투입일수 재산정이 요청되어 검토하고 그 내용을 보고드림.

1		근 거

○ 조경분야 건설사업관리기술인 적정투입일수 설계반영 협조요청

[도시기반시설본부 방재시설부-12444호(2021.9.28.)

○ 실정보고 (조경분야 건설사업관리기술인 적정투입일수 설계반영)

- 올대감 21-264(2021.10.1.)

2		사업개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사규모

- 램프신설 : L=1,600m(교량2개소, L=446m)

- 램프이설 : L=1,309m(교량1개소, L=139m)

○ 사업기간 : 2016.04.22 ~ 2022.12.31.(전체), 2021.07.06 ~ 2021.12.31(6차)

○ 총사업비 : (전체) 56,399백만원(‘21년 : 8,706백만원)

○ 공 정 율 : 77.0%

3		검토내용

□ 실정보고 요약내용

◦ 개요 : 조경공사 품질관리를 위한 건설사업관리기술인 적정투입일 재산정

◦ 내용 : [당초]조경분야 72일 → [변경]조경분야 110일(증,38일)

※ 산출근거 : 식재가능시기(봄,가을)에 시공가능일수 고려함

□ 검토내용

◦ 전체분 설계변경 추진계획

- 변경사유 : 조경감리원 추가투입일 반영(증, 38일)

- 변경현황

⦁ 도 급 비 : (당초) 4,829백만원 → (변경)4,852백만원(증 : 23백만원)

⦁ 용역기간 : 변경없음

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비고
사업비	5,079,000,000원	5,079,000,000원	-
도급비	4,829,400,000원	4,852,100,000원	22,700,000원
용역기간	‘16.04.22.~’22.12.31. (80.0개월)	‘16.04.22.~’22.12.31. (80.0개월)	-

※ 사업비 : 총사업비 변경없이 감리용역 사업비 범위내에서 설계변경 가능함

◦ 금차분(‘21년) 설계변경 추진계획

- 변경사유 : 조경감리원 배치기간 조정 반영(증, 15일)

- 변경현황

⦁ 도 급 비 : (당초) 792백만원 → (변경)800백만원(증 : 8백만원)

⦁ 용역기간 : 변경없음

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비고
사업비	800,000,000원	800,000,000원	-
도급비	792,400,000원	800,000,000원	7,600,000원
용역기간	‘21.01.01.~’21.12.31. (12.0개월)	‘21.01.01.~’21.12.31. (12.0개월)	-

※ 사업비 : 감리용역 21년 본예산 감리용역 사업비 범위내에서 설계변경 가능함

5		감리단 검토의견

○ *************************************************************************************************

6		조치계획

○ *****************************************************************************************************************

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.