문서번호	설비부-9354
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		이달영	08/25 박기형
협 조

- 신월지하차도 평면화 전기공사 -

예비 준공검사 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

도시기반시설본부

설 비 부

- 신월지하차도 평면화 전기 -

예비 준공검사 계획 보고

신월지하차도 평면화 전기공사의 준공기한('14.09.28)이 도래함에 따라 준공전 예비 준공검사를 다음과 같이 실시하여 공사 준공처리에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 신월지하차도 평면화 전기공사

□ 공사위치 : 서울시 양천구 신월6동 신월지하차도(강월초교입구 교차로)

□ 공사규모 : 지하차도 평면화(폭 30m, 연장 200m)

지하차도 폐쇄(폭 2차로, 연장 182m)

□ 공사기간 : 2014.01.02～2014.09.29

□ 도 급 비 : 금169,620,000원

□ 시 공 사 : (주)남일기업 대표 이범석

□ 감 리 사 : ㈜트래픽스(교통신호 분야)

Ⅱ		예비준공검사 계획

□ 예비준공검사 일시 : 2014.08.26(화)

□ 예비준공검사 참여자

□ 검사자(직원 2명) : 유지관리 부서 합동 점검

- 서울특별시 강서도로사업소(기전과 직원 1명)

- 양천구청 안전치수과(하수기전팀 직원 1명)

□ 입회자(감리원 1명, 현장대리인 1명)

- 감리원(교통신호), 현장대리인(전기)

□ 예비준공검사 내용

□ 준공기한 내(內) 준공가능 여부 및 미진사항의 사전 점검 보완

□ 설계도서, 점검표 등에 의거 검사(지적사항 작성)

□ 예비준공검사 실시결과 조치계획

□ 예비준공검사 실시결과 지적사항에 대하여는 감리원에게 보완지시

□ 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완하고 책임감리원의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅲ		향후 계획

□ 2014.08.26일 : 예비준공검사 실시

□ 2014.09.28일 까지 : 준공처리 및 인수인계 완료

따로붙임 : 예비준공검사 현장점검표 1부. 끝.