문서번호	시설과-4820
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
황은애	하종식	10/05 박종수
협 조

『시민의숲 노후포장 정비공사』

준공기한 연기 검토 보고

2021. 10.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

『시민의숲 노후포장 정비공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리 사업소에서 추진중인 『시민의숲 노후포장 정비공사』와 관련하여 준공 연기 사항이 발생하여 아래와 같이 검토보고 드림

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 시민의숲 노후포장 정비공사

*******************************

**************************************

************************

Ⅱ		검토내용

❍ 연기사유 : 공사기간 중 잦은 우천에 따른 현장작업 지연으로 절대공기 부족

❍ 준공기한 변경

**********************************

**********************************

※ 부대공종(폐기물 처리용역) 준공기한 연기

**********************************

**********************************

❍ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		행정사항

❍ 계약부서에 준공기한 변경 계약 요청

붙임 : 준공기한 연기 검토 공문 1부. 끝.