문서번호	시설관리과-18805
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
지예솔	김형식	유명은	10/05 代추경민
협 조

『2021년 아리수 직결음수대 설치공사(신곡초등학교외 7개소)』

설계변경 심의위원회 개최 계획 보고

2021. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

『2021년 아리수 직결음수대 설치공사(신곡초등학교외 7개소)』

설계변경 심의위원회 개최 계획 보고

우리사업소에서 시행 중인 『2021년 아리수 직결음수대 설치공사(신곡초등학교외 7개소)』에 대한 설계변경 심의위원회 개최 계획을 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2021년 아리수 직결음수대 설치공사(신곡초등학교외 7개소)

○ 공사개요: D15~20㎜, L=129m

○ 공사기간: 2021.05.21. ~ 2021.10.17.

○ 계 약 자: 주식회사 열방이엔씨 대표 이동현

○ 계약금액: 9,414,190원

□ 설계변경 사유

○ 현장여건 변동에 따른 공종별 물량 증·감에 따른 변경

- 증 : 텍스설치 외 5개 공종

- 감 : 현장여건 변동으로 인한 D15~20㎜, L=129m → L=120m

입상브라켓트(수도, 강제전선관지지용) 외 7개 공종

○ 신규 자재 발생에 따른 변경

- 신규자재: 이경티(삽입식 스텐레스이음쇠 25*13) 외 5개

□ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
공급가액	8,558,355	8,815,519	증)257,164
부가가치세	855,835	881,551	증)25,716
도급액	9,414,190	9,697,070	증)282,880

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시: 2021.10.07. (목) 10:00

○ 장    소: 사업소 3층 회의실

○ 심의내용: 물량 증·감 적정성 및 설계변경 타당성 검토

○ 심의위원

- 위 원 장: 시설관리과장(시설5급 유명은)

- 위    원: 급수운영팀장(시설6급 문병희), 급수관리팀장(시설6급 정헌석)

시설운영팀장(시설6급 이연창), 시설안전팀장(시설6급 김형식)

□ 행정사항

○ 사업소 자체 설계변경 심의 후 결과보고

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.