문서번호	설비부-14115
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	代이상진	10/05 김호성

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』관련 선행공종(토목) 공사에 임시 보안등 시설물이 저촉되어, 보안등 시설물 이설에 대한 현장여건 사항을 공사에 반영하고자 검토 보고 드림

********************

1		공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사

○ 위    치 : 구로구 남부순환로 오류IC ~ 매봉초등학교(1.1km)

○ 규    모 : 가로등 54본, 분전반 4대, 교통신호등 11본, 신호제어기 2대 설치

○ 계약현황

차 수	계 약 금 액(원)	계 약 기 간	계 약 업 체
***	***********	*************************	아산정보통신(주)
***	***********	*************************

○ 건설사업관리단 : ㈜동일기술공사, ㈜지아이건설기술그룹

2		관련근거

○ 건설사업관리단 실정보고 : 남부감 제2021-392호(2021.09.30.)

3		검토내용

○ 실정보고 사유

- 개봉1동 사거리 토목공사 저촉 지장물(임시 보안등 가공전선) 이설 필요(현장여건)

○ 검토사항

구 분	위 치	검토내용	비 고
***	******** *******	*************************************************	************

○ 현장 위치도 및 사진

위치도	사 진

○ 주요물량 변경사항

품 명	규 격	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 감
*************
******	********	*	*	***	******
*********	********	*	*	**	*****

○ 도급비 변경사항(증)

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증·감 액
****	***********	***********	************
****	***********	***********	************

○ 건설사업관리단 검토의견

- 『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』시행 중 개봉1동 사거리 선행공종(토목) 공사에 저촉되는 보안등 임시 가공전선의 이설에 대한 현장여건 사항을 전기공사에 반영함이 타당하다고 판단 됨.

4		보고자 의견

○ 건설사업관리단 기술검토의견 사항을 검토한 결과 보안등 시설물 이설에 대한  현장여건 사항을 공사에 반영함이 적정한 것으로 판단 됨

○ 실정보고 사항을 승인하고 추후 설계에 반영하여 공정 관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부