등록번호

광희동-8979

주무관

동정부2팀장

광희동장

시민친화국장

부구청장

등록일자

2021.10.5.

진형철

이진경

박종필

송인상

전결 10/05

마채숙

결재일자

2021.10.5.

공개구분

대시민공개

협조

진양상가 공중보행로 꽃길조성사업 예산 명시이월 계획

광 희 동

진양상가 공중보행로 꽃길조성사업 예산 명시이월 계획

2021주민참여예산으로 진양상가 공중보행로 꽃길조성 사업을 추진할 계획이었으나 공중보행로 조성공사가 지연되어 당해연도 사업 시행이 불가능한 사업비를 차기년도로 명시이월하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「지방재정법」제50조(세출예산의 이월) 제1항

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 진양상가 공중보행로 꽃길조성

□ 추진기간 : 2022. 3월 ~ 4월

□ 총사업비 : 20,000천원 (구비)

□ 사업내용 : 진양상가 공중보행로 꽃길 조성

시 설 명	소요예산	사업내용	비 고
계	20,000,000
진양상가 공중보행로	20,000,000	화분 설치 계절꽃 식재

□ 사업세부내역

Ⅲ		추진경위

□ ’20. 10. : 2021년 주민참여예산 사업 확정

□ ’21. 1.~ 현재 : 진양상가 공중보행로 조성공사 진행 중

Ⅳ		명시이월 예산

□ 명시이월 예정액 : 20,000천원

□ 명시이월 내역

(단위 : 천원)

사 업 명	2020년 회계연도					비고
	예산과목		예산액	지출액	잔 액 (명시이월)
	편성목	통계목
진양상가 공중보행로 꽃길조성	시설비 및 부대비	시설비	20,000 구 20,000	0 국 0	20,000 구 20,000

Ⅴ		명시이월 사유

□ 연계 사업대상인 진양상가 공중보행로 조성공사 지연되어 2021.12 중 준공예정으로 당해연도 사업 추진이 불가하여 사업비를 명시이월하고, 2022년 상반기에 사업 추진

Ⅵ		향후추진계획

□ 2022. 3. : 계획수립

□ 2022. 4. : 화분설치 및 계절꽃 식재.  끝.