문서번호	도로계획과-12987
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로계획팀장	도로계획과장
김현상		황원근	전결 10/05 권완택
협조

- 동부간선도로 지하화(영동대로) -

도시계획시설(도로)결정용역 시행계획

2021. 10.

안전총괄실

(도로계획과)

- 동부간선도로 지하화(영동대로) -

도시계획시설(도로)결정용역 시행계획

영동대로구간의「동부간선도로 지하화(재정)」사업추진을 위해 도시관리계획(도시계획시설:도로) 결정을 위한 용역을 시행코자 함

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

□ 사업개요

○ 위    치 : 강남구 대치동~청담동

○ 규    모 : 터널 4차로(병렬), 연장 2.4㎞

○ 사업기간 : 2018년~2027년

○ 총사업비 : 2,646억원

□ 추진경위

○ `12.03.21.	: 동부간선도로 지하화 상세기본계획 수립

○ `15.11.~`18.10.	: 타당성조사 및 기본계획용역 시행

○ `15.11.~`18.10.	: 타당성조사 시행(LIMAC)

○ `20.04.27.	: 투자심사 완료(조건부 추진)

- 민자사업과 연계하여 추진, 공사중 우회도로 대안마련 등

○ `20.05.29.	: 동부간선도로 지하화(재정) 추진계획 수립

○ `20.10.14.	: 동부간선도로 지하화(재정) 기본설계 착수

○ `21.10.현재	: 기본설계 중

Ⅱ		용역시행계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ********************************

○ 위    치 : *****************************

○ 시행규모 : ********************

○ 소요예산 : ********

○ 용역기간 : 착수일로부터 9개월

○ 주요 과업내용

- 도시계획관리계획(도시계획시설:도로) 결정 방안 검토

- 도시계획관리계획(도시계획시설:도로) 결정을 위한 도서 작성

- 도시계획 위원회 등 심의에 따른 설명자료 작성

- 용역 성과품 작성(도시게획시설 결정조서 및 지형도면 등)

※ 도시계획시설 결정을 위해 필요한 모든 절차이행

□ 발주방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰 참가자격

-「엔지니어링 산업진흥법」제21조의 규정에 의한 건설부문(도시계획) 사업주체를 신고필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의하여 등록한 기술사 사무소로 건설분야(도시계획)신고를 필한 업체

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행규칙 제24조에의거 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약 제결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재된 업체

○ 낙찰자 결정방법 : 적격심사

□ 소요예산

○ 총 예 산 : ********

○ 예산과목 : (도시개발특별회계)도로건설, 간선도로망확충, 동부간선도로 지하화(재정구간), 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		향후추진계획

○ 2021.10. : 기술용역타당성 심사(기술심사담당관)

○ 2021.11. : 용역 발주 및 시행

붙임 1. 설계내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.