“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기에 따른 변경계약

1. 우리사업소에서 시행중에 있는 『행정동별 수질자동측정기 설치지점 전기공사(1차사업 17개소)』에 대한 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 변경계약을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 행정동별 수질자동측정기 설치지점 전기공사(1차사업 17개소)

나. 계약업체 : *******

다. 계약금액 : ***********(변경사항 없음)

라. 준공기한 연기

- 당초 : 2021.10.11

- 변경 : 2021.11.10

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 연기사유 : 절대공기 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 기한변경 합의서 1부.  끝.

주무관	김태호		수질팀장	장은희		행정지원과장	10/05 박달경
협조자	주무관	김상진
시행	행정지원과-20097	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)