투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(서서울호수공원 무장애친화공원 조성)

1. 시설과-5679(2021. 10. 1.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건명: 서서울호수공원 무장애친화공원 조성사업

***********************

***************************************

※ 원인행위No: 402

라. 계약기간: 2021. 7. 19.~ 2021. 10. 4.

마. 변경내용: 계약금액 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	81,041,455	86,963,636	5,922,181
	부가세	8,104,145	8,696,364	592,219
	도급공사비	89,145,600	95,660,000	6,514,400

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		재무팀장	양근대		공원운영과장	代류기혁		서부공원녹지사업소장	10/05 이용우
협조자
시행	공원운영과-11760	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)