문서번호	소방행정과-9776
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박영민	박창웅	代윤승백		10/06 이상일
협 조

『도봉119안전센터 이전 신축공사』 철근 사급전환 실정보고

2021. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『도봉119안전센터 이전 신축공사』

철근 사급전환 실정보고

도봉119안전센터 이전‧신축 공사 관련 철근 관급자재의 수급차질로 공정 지연이 우려되어 사급전환을 검토보고 하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 도봉119안전센터 이전·신축 공사

○ 위    치 : 도봉구 도봉동 282-345

○ 규    모 : 지상3층, 대지면적 983㎡, 연면적 998.96㎡

○ 총사업비 : 3,983백만원(‘20년 881백만원, ‘21년 3,102백만원)

○ 공사기간 : 2021.09.07. ~ 2021.06.30.

□ 실정보고 검토내용

○ 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 6.소요자재의 수급방법 변경(행정안전부 예규 제167호, 2021. 7. 1)

- 조달청 종합쇼핑몰 공지사항(관수철근 원활한 수급을 위한 협조 요청)

- 관급자재변경(철근) 실정보고 검토의견서 ID-도봉119-2호(2021.10.06.)

○ 실정보고 사유 : 철근의 생산 및 수급이 불안전하여, 관급자재의 수급이 불규칙한 실정으로 공정 지연이 우려되어 철근을 사급전환 하고자 함

○ 최종 공사비 증감 내역

(단위 : 원)

공 종		수량 (TON)	기존내역(관급)		변경내역(사급)		증·감
			단가	금액	단가	금액
건축	이형봉강, HD-10	29.249	1,013,430	29,646,881	1,091,794	31,933,869	2,286,988
	이형봉강, HD-13	15.339	1,002,430	15,394,317	1,082,470	16,604,006	1,209,689
	이형봉강, HD-16	16.764	996,930	16,712,534	1,077,808	18,068,375	1,355,841
	이형봉강, HD-19	29.934	996,930	29,842,102	1,077,808	32,263,109	2,421,007
	이형봉강, HD-22	37.092	996,930	36,978,127	1,077,808	39,978,060	2,999,933
토목	이형봉강, HD-13	1.18	1,002,430	1,182,866	1,082,470	1,277,314	94,448
조달수수료			-	700,686	-	-	△700,686
간접비			-	-	-	18,015,267	18,015,267
부가가치세			-	-	-	15,814,000	15,814,000
계			-	130,457,513	-	173,954,000	43,496,487

○ 사급단가 근거 : 3개 물가정보지 중 최저가격 × 93.236%(협의율*)

* 협의율 93.236% : (계약상대자 요구율 100% + 발주부서 요구율 : 낙찰률 86.472) / 2

□ 건설사업관리자 검토의견

○ ㈜투데이건설에서 제출된 실정보고서의 사유, 수량 증/(-)감, 단가 적용, 변경금액을 검토한 결과 합당하다고 사료됨

□ 처리의견

○ 동절기가 오기 전 기초 및 골조의 진행을 완료해야 하는 공사일정을 고려하여 사급전환 실정보고를 승인하며, 추후 계약금액 변경은 관련 규정에 따라 조정 될 예정이니, 계약 절차 이행 대비에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 관급자재변경(철근) 실정보고 검토의견서 1부
2. 조달청 종합쇼핑몰 공지사항 1부
3. 출장복명서(2021.10.5.(화)) 1부.  끝.