문서번호	정보기획담당관-12554
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		IT컴플렉스팀장	정보기획담당관
엄기문		代김상곤	08/26 김종근
협 조
	주무관			조은재
	주무관			김상곤

-IT COMPLEX 건립 수요부서별-

시설공사 추가요청 세부사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
입주시설별 시설공사 세부추진계획 (정보기획담당관-4824)	문화관광디자인본부	공사부분	추가시설 등 요청	사업비내에서 추진
	교통방송
	정보기획단

2014.8

정보기획단

(정보기획담당관)

- IT COMPLEX 건립 수요부서별 -

시설공사 추가요청 세부사항 검토보고

IT Complex 건립사업의 완성도를 최고로 높이기 위하여 입주시설별 건축, 전기, 통신 등 시설공사에 대하여 사전에 면밀히 검토 및 협의후 운영・관리에 차질이 없도록 조치하고자함

Ⅰ		건립개요 및 추진현황

○ 건립개요

□ 위   치 : 상암동 E3-3구역

□ 규   모 : 지하7층 지상21층 (2개동), 대지면적 : 6,605㎡

총면적 : 81,969㎡, 용적률 699%, 건폐율 59%

□ 공사기간 : 2009. 4 ~ 2015. 10월( 4개월 연장예정 )

□ 총사업비 : 3,064억 (시비 2,904억, 국비 160억)

□ 시 공 자 : 대림산업(주) 컨소시엄 (감리자 : 건원엔지니어링 컨소시엄)

□ 수요부서 : 정보기획단, 문화관광디자인본부, 교통방송( 현공정 :64%)

○ 추진현황

□ ’14. 3월 : 입주사업별 시설공사 세부추진 계획(단장방침)

[ 수요부서별 현장위주의 회의개최실시 ]

□ ’14. 4~6월 : 입주부서별 회의개최 및 현황공유( 문서시행 )

□ ’14. 7월 : 입주기관별 시설개선 요청사항 검토회신(도시기반시설본부)

□ ’14. 7월 : 입주기관별 협의추진 및 추가의견 요청

□ ’14. 8월 : 수요부서별 입주준비비 등 ’15년 예산추진 방향결정(시장)

Ⅱ		입주사업별 시설부분 세부검토결과

○ 입주시설 현황

운영 기관	교통방송	문화관광 디자인본부	정보기획단
			사업	부서
입주 시설	청사이전 (기획조정실)	e-Sports 경기장 게임・애니 지원센터 (문화산업과)	∙통합보안관제센터	정보통신보안담당관
			∙통신공사
			∙앱 비지니스센터	공간정보담당관
			∙도시공간정보센터
			∙IT 통합개발센터	정보기획담당관
			∙임대시설 등
			∙클라우드센터	데이터센터

○ 입주사업별 검토결과( 첨부 : 도시기반시설본부 검토결과 )

구분	공종	수요부서 요청사항	수요부서
기본 성능향상	건축/설비 전기/통신	∙일반출입문 보안통제 장치추가 ∙CCTV 사양변경(용량확대) 및 추가설치 ∙설비기능 추가 ∙방음장치 추가(e-Sports보조경기장) ∙전기시설추가(자료실등) ∙기타 상황실 시스템박스 추가설치 등	전부서
추가요청	건축/설비	∙데이터센터 천정상부 냉각수 배관변경 ∙데이터센터 천정상부 이중천정설치	데이터센터
평면변경	건축	∙e-Sports 주경기장 객석 난간변경 ∙평면(lay out)변경(경미사항) ∙바닥마감재 및 창호변경	전부서
삭제시설	통신/설비 건축	∙주방기구 등 ∙e-Sports보조경기장 수납식 객석 ∙회의실 암막스크린 등 ∙키오스크	전부서

※ 구매설치품목(전광판크기변경 및 DLP 추가요청 ) 별도검토중임

Ⅲ		행정사항

○ 수용가능시설은 준공에 지장이 없도록 예산 범위내에서 추진

□ 부서별 시설변경 요구사항에 대하여는 조속시행

□ 전체 시설예산 범위내에서 예산집행

○ 수용불가에 따른 별도협의부분( 구매설치・장비 부분 )

□ e-Sposts 주경기장 전광판 사이즈 확대( 문화산업과 )

□ DLP 사양변경( 정보통신보안담당관 )

□ 도시공간정보센터 상황실 DLP 추가( 공간정보담당관 )

Ⅳ		향후계획

○  ’14. 8월 : 입주사업별 시설공사 세부추진

○  ’14. 9월~ 12월 : 시설별 공정추진 및 지속적 협의

[ 정보기획단, 문화관광디자인본부, 교통방송 ]

<별도첨부> 도시기반시설본부 검토결과서 1부.

교통방송 추가요청사항 1부.