문서번호	시설과-5983
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	시설과장
서민수	김영백	08/26 代김영백
협 조

종로구 이화동 공가철거 관련 작업기간

연장검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

중부공원녹지사업소

(시  설  과)

『남산공원 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)

이화동 공가철거 관련 작업기간 연장검토 보고』

종로구 이화동 공가건물 철거 관련 잦은 강우와 석면조사 등 행정절차 이행과 인접한 무허가 건물주와 공가건물 병행철거가 불가피하여 작업기간을 연기하고자 보고드림

공사개요

공 사 명 : 남산공원 및 산하공원 시설물 보수정비공사(단가계약)

공사기간 : 2014. 3. 25 ~ 12.31

도 급 비 : 400,000천원

도 급 자 : 대표건설(주) 대표 박종현

작업지시 내용 및 추진현황

구 분	작업기간	작업지시 내용	추진현황	비고
4차 작업지시 (‘14.6.27)	‘14.6.30 ~ 8.30	ㅇ 이화동 공가 건물 3동 철거 ㅇ 주변시설물 정비	ㅇ진행중(공정 45%) - 석면조사 ,철거 완료 - 공가건물 철거 중
5차 작업지시 (‘14.7.14)	‘14.7.14 ~ 8.30	ㅇ 이화동 9-59번지외 4필지 지상 시소유 건물 - 시소유 건물 주변 안전휀스 (가설울타리) 설치 - 무허가 건물 철거 ㅇ 남산공원 용이게이트볼 창고 지붕누수 보수	ㅇ진행중(공정 40%) - 가설울타리설치완료 - 무허가 건물철거 작업보류 - 용이게이트볼 창고 지붕누수 작업중

작업기간 연기 사유

- 4차 작업지시

· 여름철 잦은 강우, 석면조사와 철거 행정절차 이행과 인접한 건물

소유주와 철거일정 협의 등으로 작업일수가 부족하여 작업기간 30일   연장 필요(2014.9.30일까지 연장)

- 5차 작업지시

· 이화동 9-59번지 개인소유 건물(제126호)의 무단증축 건물과 안전상

병행 철거가 불가피한 실정임

· 현재 시소유 공가건물 사용에 대하여 본청 주관부서인 조경과와 서   울도서관, 주거재생과와 협의가 진행 중에 있어 제126호 건물주가

무허가 건물 철거를 보류 중에 있어 작업기간 연기가 불가피한 실정이   므로 작업기간 60일 연장 필요(2014.10.31일까지 연장)

보고자 의견

상기 현안사항 내용과 같이 작업기간의 절대공기 부족하므로 작업공기를 연장하여 공사시행에 철저를 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부. 끝.