문서번호	도로보수과-3883
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최영서		국중진	08/26 정진오
협조
	주무관		박성민

왕산로 중앙버스전용차로 파손 대책회의 결과 및 조치계획 보고

2014. 8.

성동도로사업소

(도로보수과)

왕산로 중앙버스전용차로 파손 대책회의 결과 및 조치계획 보고

소성변형과 포트홀로 안전과 편의성이 안좋은 왕산로 중앙버스전용차로에 대해 유지보수 관계자 회의 개최결과 및 조치계획 보고

▢ 대책회의 개최

○ 일시 및 장소 : 8월 18일(월) 14시, 성동도로사업소

○ 참 석 자(5명) : 성동도로사업소 도로보수과장, 최영서주무관

교통운영과 중앙차로팀 박종현주무관,

도로관리과 포장관리팀 최현주무관,

품질시험소 도로포장연구센터 윤상열주무관

○ 내  용 : 현장조사 및 유지보수 방안 검토

▢ 주요 검토내용

○ 파손 재발 방지 방안

- 아스콘 포장 보수 두께

- 원활한 배수

○ 보수공사 추진 방법

- 예산 확보관련

- 최우선 정비구간과 정비방법

▢ 대책회의 결과

○ 파손 재발 방지

- 정류장구간 아스콘 전체 두께 개량(t=20cm) : 코아채취 및 노면 육안조사 결과 파손두께가 20cm 이상

- 원활한 배수 : 신속한 배수를 위해 반대차로까지 정비하여 현재 횡단구배보다 경사도 상향(2~3%), 트랜치 청소

○ 보수공사 추진

- 하반기 노후포장도로정비공사 재배정 예산 활용 사후 정산

- 하반기 예산 범위내 정류장과 정류장의 반대차로 우선 정비

· 정류장 8개소 t=20cm, 24a         · 정류장 반대차로 t=12.5cm, 16a

▢ 보수공사 추진 계획

○ 2014. 8. 27.       : 무단횡단방지휀스 제거(교통부속물 유지관리공사 업체)

○ 2014. 8. 29. ~ 30. : 아스콘 절삭후 중층(#467 일반) 포장

○ 2014. 9.  2.       : 아스콘 표층(#67, 개질) 포장

○ 2014. 9.  4.       : 트랜치 청소(직영반)-필요시 야간작업.  끝.