“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사계약 이행 지체에 따른 독촉

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 감독 시행중인『고척동 166번지 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사』건에 대해 시공업체 및 귀 공단의 요청에 따라 준공기한을 당초 2021.10.10.에서 2021.11.30.로 연기하였으나, 2021.10.05.현재까지 특별한 사유없이 제5구간의 공사가 진행되지 않아 상수도 행정에 막대한 지장을 초래하고 있는바 기한 내에 처리될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 귀 공단에서 준공기한인 2021.11.30.까지 설계변경 계약 및 준공계 제출 미이행 시 공사계약일반조건 제8절 1항 계약이행의 지체에 의거 지연배상금이 부과 처분될 수 있음을 알려드립니다. 또한 향후 준공기한내 잔여공종 완료 및 준공처리가 불가할 경우 정당한 사유에 한하여 준공기한이 연장될 수 있음을 알려드립니다.

4. 준공기한 내 완료될수 있도록 공사관리 및 감독업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	문병희		급수운영과장	10/06 성기선
협조자
시행	급수운영과-19149	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(5)