문서번호	도로보수과-7752
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
백승만		代박상구	08/26 조병준
협조

설계변경 검토 보고(제1회)

[2014년 노면표시 유지보수 공사]

2014. 8

강서도로사업소

[도로보수과]

설계변경(1회) 검토 보고

공사 시행중 물량 증․감을 반영하고 이후 작업물량을 추정하여 설계변경을 시행코자 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

○ 공사기간 : 2014. 04. 11. ~ 2015. 05. 25.

○ 공사개요 : 차선도색 148,485m, 차선제거 10,000m, 표지병설치 200개 등

○ 도 급 액 : 305,664,440원

○ 도 급 자 : 해성실업(주) 이범용

관련근거

○ 제1차 ~ 제4차 작업완료 보고서 : ㈜영호이엔씨(공사 감리)

설계변경 사유

○ 노면표시 (재)도색에 대한 당초계약 물량과 현재까지 작업완료(제4차) 물량을 반영하고 준공 시까지의 추정물량을 감안하여 시행에 만전을 기하기 위함

주요 물량 변경 내역(안)

공 종	규 격	단위	계약 물량	작업완료 물량(누계)	잔여 물량	변 경 물 량	비 고
고성능융착식 (수동식)	백색 실선, 15Cm	m	3,000	1,002	1,998	3,000	-
고성능융착식 (수동식)	백색 파선, 15Cm	m	2,000	644	1,356	2,000	-
고성능융착식 (수동식)	황색 실선, 15Cm	m	4,000	384	3,616	2,000	감) 2,000
고성능융착식 (수동식),재도색	백색,문자 기호,15Cm	m	30,400	15,249	15,151	27,940	감) 2,460
고성눙융착식 (수동식),재도색	백색,횡단 보도,15Cm	m	50,000	20,471	29,529	40,000	감) 10,000

공 종	규 격	단위	당 초 계약물량	작업완료 물량(누계)	남은공사 예정물량	변 경 수 량	비 고
융착식 (수동식)사급	황색 실선, 15Cm	m	-	-	500	500	증) 500
융착식 (수동식)사급	황색 파선, 15Cm	m	-	-	500	500	증) 319
융착식 (수동식)사급, 재도색	황색 실선, 15Cm	m	-	1,716	(1,716)	3,000	증) 838
융착식 (수동식)사급, 재도색	황색 파선, 15Cm	m	-	3,893	(3,893)	5,000	증) 273

설계 변경 내역(안)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
총 공 사 비		305,664,440	305,664,440	없음
도급비	공 급 가 액	277,876,764	277,876,764	없음
	부가가치세	27,787,676	27,787,676	없음
	계	305,664,440	305,664,440	없음

조치의견

○ 상기와 같이 설계변경하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝.