문서번호	녹지관리과-8586
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
이찬희	代김대수	김윤철	08/26 이용태
협 조

세종대로 가로수 합동 점검 결과 보고

2014.08.

중부공원녹지사업소

녹지관리과

세종대로 가로수 합동 점검 결과 보고

세종대로 가로수 중 이식공사를 한 가로수 9주에 대하여 합동 점검을 실시하고 그 결과를 보고 합니다.

수목조사

점검일시 : 2014. 08.22. : (10:00)

점검내용 : 세종대로 열린시민마당  이식공사 은행나무 9주

점 검 자 : 9명

- 이규하 교수 (서울대 )

- 이경준명예교수(서울대)

- 이희봉 원장(나무병원)외 1명

- 최형순 주무관 (도시기반시설본부 시설국)

- 김상국(서울시 시설관리공단)

- 유지용주무관(푸른도시국 조경과)

- 김윤철녹지관리과장(중부공원녹지사업소)

- 박병구팀장(중부공원녹지사업소)

- 이찬희 주무관 (중부공원녹지사업소)

점검 결과

생육불량원인: 은행나무 이식공사시 표토부까지 상식하지 않음

데크설치에 따른 표토부 상승 (약 30㎝)

조치 사항

※ 공사업체에 하자 요청하여 처리

고사되어 가는 은행나무 1주 : 8월 중 실시

- 은행나무 데크 아래에 묻혀있는 상토는 상판을 제거 후 상토제거      작업 실시

- 상토 제거 작업에 따른 데크 보수 실시

(지지대 늘임 및 보강작업 등)

이식공사를 한 은행나무 8주 : 9월초순에 실시

사후 관리

상토제거 제거 후 지속적인 관찰

관수 및 영양제를 지속적으로 주입