문서번호	교량안전과-15269
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이상문		강천수	10/12 조현석
협 조

「'21년 잠실대교 보수공사」실정보고에 따른 사업계획 변경 검토 보고

2021. 10.

「2021년 잠실대교 보수공사」실정보고에 따른 사업계획 변경 검토 보고

『 ‘21년 잠실대교 보수공사 』시행 중 잠실대교 유지관리와 관련 건설사업관리자가 실정 보고한 사항에 따른 사업계획 변경 검토 보고 임.

Ⅰ		관련 근거

□ 실정보고〔잠실대교 교면보수 추가 시공 및 이에 따른 공기연장〕

〔(주)동명기술공단 2021-542호(2021.09.29.), 559호(2021.10.05.)〕

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : ‘21년 잠실대교 보수공사

□ 규    모 : 교면포장 및 방수 81.5a, 상판보수 261㎡

□ 공사기간 : 2021. 4.28. ~ 2021.10.24.

□ 총사업비 : 1,400백만원

□ ********************

□ **********************

Ⅲ		감리단 보고 내용

□ 보고내용

○ ************************************************************

○ ****************************************************************************

○ **************************

- 위    치 : 하류측 P20~P23

- 규    모 : B=14.2m, L=120m, A=17.04a

- 소요예산 : 78백만원

- 공기연장 : 27일

□ 실정보고 주요 공종 변경 사항

공 종	위 치	규 격	수 량	비 고
1. 절삭후 아스팔트 덧씌우기	하류측 P20 ~ P23	L=120m, B=14.2m	17.04 a
2. 교면 방수	하류측 P20 ~ P23	도막재 가열 및 용융	1,704㎡
1) 유공관 및 성형줄눈	보도측		120m
2)주입줄눈	중분대 및 측구		240m

※  추가구간 비목 단가 : 계약단가 적용

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

□ 교면포장의 내구성 증진을 위하여 추가 공사가 필요한 바, 실정보고 내용을 승인하여 본 공사의 총사업비(낙찰차액 및 계약심사 절감액 활용)내 에서 추가로 교면 포장 및 방수 공사를 시행하고자 하며

□ 추가 공사에 소요되는 공기만큼 연장 조치

○ 당초 : 2021. 4.28. ~ 2021.10.24.

○ 변경 : 2021. 4.28. ~ 2021.11.20.(27일)

○ 귀책사유 : 서울시

□ 건설사업관리용역 책임건설사업관리기술인에게 승인내용을 통보하여 공사 시행하고, 신속한 공사추진을 위하여 선 시공 후 설계변경 시 반영코자 함.

□ 예산사용 현황

총사업비	도급비	관급비	이전비	낙찰차액	계약심사절감액
1,400,000,000	947,812,000	214,860,000	85,250,000	130,078,000	22,000,000

첨부  실정보고서 1부.  끝.