“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	"상수도 건설공사 관리실태감사" 결과 처분 통보

1. 안전감사담당관-2440(2021.2.25.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 “상수도 건설공사 관리실태감사”시 지적된 상수도관 폐관 충진재 품질관리 소홀에 대하여 주의 통보하오니 폐관 충진의 품질검사 등 공사관리 업무에 소홀히 한 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바라며, 향후 상수도공사 감독시 유사한 사례가 발생되지 않도록 직원 지도,교육을 시행해 주시고

3. 아울러 서울특별시 공사 감독업무 대행협약서에 의거 품질시험계획서 작성 소홀 및 폐관 충진재의 품질기준 충족여부를 제대로 시행하지 않은 시공자(건설사업자, 그 소속해당 건설기술인)에 대하여『건설기술 진흥법』제53조(건설공사 등의 부실측정)제1항 및 같은 법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실측정) 제5항(별표. 8.건설공사 등이 벌점관리기준) 규정에 의거 벌점 부과 검토 결과를 ‘21.10.26(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

연번	공 사 명	업 체 현 황					폐관 충진 현황
		수급인			충진재 납품 현황
		업 체 (대표)	도급액	공사기간	자재업체	공사비	규격	연장	충진량(㎥)			품질관리 적정여부
									수량	주입	증감
1	서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사	세인트건설 (송선옥)	614	’19.4.29~ 12.20	길한건설	27	800	300	150	142	-8	충진시공계획서 사급자재승인서 품질계획서 관충진주입량검측여부 압축강도 및 시험성적서 제출여부
2	한남테니스장~청구역간 송배수관 정비공사	강욱건설(주) (전혜임)	1,860	’18.4.27~ ‘19.9.2	길한건설	43	900	300	190	240	50
3	청구역~신당역 간 송배수관 정비공사	태정개발㈜ (김용순)	965	’19.4.24~ ’19.11.13	한일시멘트	27	900	200	127	131	4

붙임 : 상수도공사 관리실태감사 처분요구사항 통보 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		급수운영팀장	박장진		급수운영과장	10/12 代박장진
협조자
시행	급수운영과-19013	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2145	/전송	02-3146-2189	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)