문서번호	조경과-11902
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	조경관리팀장	조경과장
최배근	김병완	10/12 안수연

2021년 걷고 싶은 장미정원 조성사업

마포구 대상지 변경 검토보고

2021. 10.

푸른도시국

(조 경 과)

2021년 걷고 싶은 장미정원 조성사업

마포구 대상지 변경 검토보고

마포구에서 추진중인 ‘2021년 걷고 싶은 장미정원 조성사업’과 관련하여 사업 대상지 변경 승인 요청이 있어 아래와 같이 검토하고 보고드림

※ 마포구 공원녹지과-19624호(2021.10.12.)

사업개요

❍ 사 업 명: 2021년 걷고 싶은 장미정원 조성사업

❍ 위    치: 마포구 성산동 405 일대(면적 3,000㎡)

❍ 사업기간: 2021. 7. ~ 11.

❍ 사업내용: 미니장미, 덩굴장미 등 다양한 사계장미를 식재하여 특화정원 조성

❍ 사 업 비: 1,000백만원 (추경)

대상지 변경내용

❍ 변경내역

구 분	당 초	변 경
대 상 지	성산동 405 일대	합정동 450-6 일대 등 4개소
면 적	3,000㎡	2,790㎡
사업내용	사계장미를 식재하여 특화정원 조성	사계장미를 식재하여 특화정원 조성
사 업 비	1,000백만원	1,000백만원
비 고	시유지, 한국교통안전공단	시유지

❍ 변경사유

- 당초 성산자동차검사소 측과 대상지 사용 등 사업 추진을 위한 사전 절차에 대한 협의를 완료하였으나, 한국교통안전공단 본부에서 해당 대상지에 서울본부 증축 계획 등의 사유로 부지 사용 불가를 통보하여 대체 부지 확보 필요

- 합정동 450-6 등 4개소는 시유지이며, 시 관리도로에 위치하고 있어 유동인구가 많으나 노후되어 정비가 시급함

보고자 의견

❍ 당초 사업대상지가 한국교통안전공단의 부지사용 불가 통보에 따라 대상지 변경이 불가피하며, 변경 대상지의 현황 및 주변 여건 등을 고려할 때 사업대상지로 적정함

❍ 단, 사업대상지 변경으로 규모가 다소 축소됨에 따라 과도한 설계가 되지 않도록 설계심의 등 향후 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 대상지 변경 요청 공문 및 방침서 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.