투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행[2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사]

1. 기전과-7900(2014.8.25)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 보행불편해소, 교통약자 이동편의 증진 및 교통소통을 위해   추진한 교통신호기공사에 대하여 책임감리사로부터 설계변경(정산) 보고가 접수되어 검토한 바 적합하여 설계변경(정산)을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사

나. 공사기간 : 2013. 11. 6 ~ 2014. 8. 31

다. 시공업체 : 경신전기(주) 대표 김경택

라. 공사금액 : 금133,930,000원

마. 설계변경 내용

❍ 공사금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	133,930,000	141,900,000	7,970,000(증)	-

❍ 설계변경 사유

- 당초 설계도서(내역서/도면)와 현장조사 결과 상이한 부분에 대하여

현장여건에 맞게 물량 증감 발생

- 관할구청 및 관할서의 교통안전시설물 개선요청 등으로 추가 시행 및

전기안전검사 수수료 등 기타 정산

바. 예산과목 : 1.도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소을위한 횡단보도확충정비, 시설비(51,128,000원)

2.도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화,

도로교통소통개선, 시설비(65,130,000원)

3.자전거이용활성화및교통환경개선, 교통약자이동편의증진,

노인․장애인보호구역개선, 시설비(25,642,000원)

붙임 :  1. 설계변경(정산) 방침서 1부.

2. 설계변경(정산) 보고(책임감리사) 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 제비율검증서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	백윤광		기전과장	정윤식		북부도로사업소장	08/26 代정수현
협조자	주무관	박신범		주무관	박경우		관리단속과장	정수현
시행	기전과-7907	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번2동 365-1번지 북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개