		동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구조장비(배터리식 램) 수리 납품기한 변경보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-5858(2021.9.23.)호「구조장비(배터리식 램) 수리 계획 보고」

나. 영진솔루텍 YJ2021-1008A(2021.10.8.)호「장비 수리 요청에 관한 지연 사유서)」

2. 현장대응단(구조대)에서 관리 운용중인 배터리식 램 수리건에 대한 납품기한 변경 요청이 있어 아래와 같이 납품기한을 연장처리 하고자 합니다.

가. 계약현황

1) 건   명 : 구조장비(배터리식램 EDD V4) 수리

- 고장내용 : 배터리식램 프로텍션 커버 파손

2) 납품기한 : 2021.10.12.(화)

3) 계약업체 : 주식회사 영진솔루텍(사업자등록번호 : 122-86-43598)

4) 계약금액 : 금 290,000원(금이십구만원)

나. 납품기한 연장 사항

1) 납품일자 : 2021.11.8. (1차 연장)

- 계약업체에서는 연장 기한을 지정하지 않고 1개월 이상으로 요청하여 연장요청 문서를 통보 받은날로 산정하여 납품일자를 지정함.

2) 연장사유 : 수리 부속품 수입지연

- 코로나19 사태로 인한 생산중인 현지(네덜란드) 공장 출하 지연에 따라 계약업체에서 납품기한 연장 요청

※ 참고사항 : 구조장비(배터리식램 EDD V4) 수리 계약시 해당 업체에서 동일  제품 수리 완료시 까지 무상 제공

붙임  관련문서(장비 수리 요청에 관한 지연 사유서) 1부.  끝.

담당자							이진철			구조팀장					권석용					재난관리과장					10/11 신자행
협조자
시행			재난관리과-6318									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 2층 (신대방동)															/
전화		02-6913-7751						/전송			02-848-2111					/	buljabi@seoul.go.kr												/	대시민공개