문서번호	토목부-19019
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	10/14 임춘근
협조

- 신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 -    CS-I 거더 재설계 검토결과 보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 -

CS-I 거더 재설계 검토결과 보고

본 공사에 적용되는 CS-I 거더의 제작구매 중 균열이 발생되어 책임감리단에서 보완설계된 구조물을 안전하게 적용하고자 제출된 설계도서를 검토하고 그 결과를 보고드림

1		근 거

○ 거더 제작업체 : CS-I거더 보완설계도서 제출

- 유신 구조-21-6040(2021.10.08.)

○ 책임감리단 제출 : CS-I 거더 재설계 결과 검토보고

- 신림차고지(감)제2021-179호(2021.9.29.)

※ 검토근거: 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제8절 “시공단계업무” 제92조(기술검토 및 교육) ④항

2		사업개요

○ 사 업 명 : 신림공영차고지(저류조포함) 건설공사

○ 공사규모

- 주차장(버스 101대)[지하1층 61대 + 지상 40대]

- 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥)

○ 사업기간 : 2018.10.01 ~ 2023.12.31.(전체) ’21.1.5.~’21.12.31.(3차)

○ 총사업비 : (전체) 686억원

○ 공 정 율 : 25.2.%

3		검토내용

□ 보고 요약내용

◦ 검토내용 : CS-I 거더 보완설계도서

◦ 검토목적 : 보완설계에 대한 적정성을 검토하여 원활한 공사를 추진

◦ 주요 검토내용

- 콘크리트 규격변경 및 강연선 개수 조정내용

- 정착구 철근보강 및 전단 연결재 추가내용

- 강거더 복부 관통철근 추가 및 정착구 단부 단면 변경사항

□ 검토내용

◦ CS-I거더 계약현황

- 계 약 명 : 신림공영차고지 건설공사(CS-I거더 제작구매)

- 계약금액 : 4,983,000,000원

- 계약일자 : 2020년 12월 18일

- 납품기한 : 2021년 12월 31일

- 납품방법 : 제작 및 설치

- 특허번호 : 특허(제10********호) “지점부 이동에 의한 강합성빔 제작방법”

- 납품수량 : 154본

- 제 작 사 : 한우물중공업주식회사

◦ 추진현황

- ‘21. 06. 03 : CS-I거더 Crack 최초 발생

- ‘21. 06. 25 : 설계사(유신,도화) 및 제작사 합동회의 실시

- ‘21. 07. 06 : 1차회의 개최

· 구조분야 박윤제, 변순주위원, 콘크리트분야 김은겸교수 및 설계사,감리단, 제작사

- ‘21. 08. 13 : 재 설계 완료

- ‘21. 08. 19 ~ ’21. 09. 07 : CS-I거더 시험제작 및 인장실시(총 4본 : Type1,6,7,12)

- ‘21. 09. 09 : 재설계 적용후 Crack 발생

- ‘21. 09. 15 : 2차회의 개최(Crack 평가 및 적용성 검토)

· 구조분야 박윤제, 변순주위원, 콘크리트분야 김은겸교수 및 설계사,감리단, 제작사

- ‘21. 09. 27 : 보완설계 완료

◦ 주요 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
1. 콘크리트 규격변경	⦁19-50-150(Slump)	⦁20-50-600(Flow)
2. 강연선 갯수 조정	⦁ TYPE 1~ 12 : 19EA 배치	⦁TYPE 1~3, TYPE7~9 : 19EA 배치 ⦁TYPE 4~6, 10~12 : 15EA 배치
3. 정착구 철근보강	⦁ Layer : 8열 ⦁ 간 격 : 7@100mm ⦁ 직 경 : 횡방향 H16, 종방향 H16	⦁ Layer : 13열 ⦁ 간 격 : 9 @ 60mm + 3 @ 100mm ⦁ 직 경 : 횡방향 H22, 종방향 H16

구 분	당 초	변 경	비 고
4. 전단 연결재 추가	⦁ 케이싱 콘크리트 단부와 220mm 이격	⦁ 케이싱 콘크리트 단부와 60mm 이격
5. 강거더 복부 관통철근 추가	⦁ 정착부 : 8EA, 중간부 : - EA	⦁ 정착부 : 12 EA, 중간부 : 1~12EA
6. 정착구 단부 단면변경

4		감리단 검토의견

○ *****************************************************************************************************

○ ***************************************************************************************

5		조치계획

○ ***************************************************************************************

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.