문서번호	설비부-14544
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		문학준	10/14 김호성
협조

『금천소방서 건립 정보통신공사』

관급자재(통합배선반) 설계변경(정산) 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

『금천소방서 건립 정보통신공사』

관급자재(통합배선반) 설계변경(정산) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『금천소방서 건립 정보통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 접수된 관급자재(통합배선반) 설계변경(정산)에 대한 실정보고 사항을 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

***************************

*********************************************

*************************************

***********************************

**********************

*************************************

******************

**************

Ⅱ		관련근거

□ 금천소방서 건립 건설사업관리단 문서[itm 202 제21-323호('21.10.13.)]

○ 금천소방서 건립 정보통신공사 관급자재(통합배선반) 설계변경(정산) 검토 보고

Ⅲ		검토내용

□ 관급자재 계약현황

계약번호	계약자	계약건명	계약금액(원)	납품기한
*************	*******	********	***********	***********

□ 변경사유 : 산업안전보건관리비‧퇴직공제부금비 미사용에 따른 정산

□ 변경내용                                                 (단위 : 원)

구 분		계 약 금 액
		당 초 금 액	변 경 금 액	증·감 액	비 고
재 료 비		79,435,493	79,435,493	-
노 무 비		51,668,837	51,668,837	-
경비	산재보험료	1,911,747	1,911,747	-
	고용보험료	449,519	449,519	-
	산업안전보건관리비	4,271,971	-	감) 4,271,971
	퇴직공제부금비	1,260,502	-	감) 1,260,502
소 계		7,893,739	2,361,266	감) 5,532,473
일반관리비		3,573,755	3,241,806	감) 331,949
이 윤		9,470,450	8,590,780	감) 879,670
공 급 가 액		152,042,273	145,298,182	감) 6,744,091
부 가 가 치 세		15,204,227	14,529,818	감) 674,409
합 계		167,246,500	159,828,000	감) 7,418,500

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 계약사에서 요청한 관급자재(통합배선반) 산업안전보건관리비‧퇴직공제부금비 미사용에 따른 경비 정산 건에 대하여 관련 기준에 의거 검토 결과 감액 정산함이 타당함.

Ⅳ		보고자 의견

□ 건설사업관리단이 제출한 관급자재(통합배선반) 설계변경(정산)이 적정하다고 판단되어 승인하고, 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝