문서번호	설비부-14546
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
지상범	장재순	10/14 김호성

『평창동 미술문화복합공간 건립 통신공사』

설계변경 소위원회 심의 조치결과 보고

2021. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『평창동 미술문화복합공간 건립 통신공사』

설계변경 소위원회 심의 조치결과 보고

『평창동 미술문화복합공간 건립 통신공사』와 관련하여 실정보고 승인 사항에 대한 설계변경 소위원회를 완료하고, 조치결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함

1		공사개요

❍ 사 업 명 : 평창동 미술문화복합공간 건립 통신공사

❍ 공사위치 : 종로구 평창문화로 101(평창동 148-6)외 8필지

❍ 공사기간 : 2019.11.11. ~ 2021.10.31.

❍ 도 급 비 : 232백만원

❍ 감 리 단 : ㈜영화키스톤건축사무소

❍ 시 공 사 : ㈜한걸음정보통신

2		검토내용

관련근거

❍ 설계변경 자문위원회 결과보고(19차)(설비부-14020호, `21.10.01)

❍ 설계변경 조치결과 검토보고(PPA 제2021-551호, `21.10.13.)

설계변경 사유

❍ ******************

- ****************************************

- *********************************

- ************************

- **********************************

공사비 증·감현황

❍ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 반영(조건부 가결)             [단위: 원]

심의요청 금액	심의결과 금액	증 감
***********	***********	************

❍ 공사비 증·감현황                                              [단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
총 차	***********	***********	*************

설계변경 세부내용

[단위: 원]

연번	공 종	공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
*	*******************	**********	**********	**********
*	*******	**********	**********	*
*	**********	**********	**********	**********
*	*******	**********	**********	*********
*	*********	**********	*********	***********
*	******************	*********	*********	*
*	******	*********	*********	*********
*	*******	*	**********	**********
*****		***********	***********	**********
*****		**********	**********	**********
***** **		**********	**********	**********
***		***********	***********	**********
*****		**********	**********	*********
****		***********	***********	**********

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 설계변경 소위원회 지적사항에 대한 조치내용을 검토한 결과 공사비 및 수량 증·감 등에 대하여 조정함이 타당하다고 사료되며, 설계변경계약 내역서를 검토한 결과 적정함.

3		보고자 의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견을 검토한 결과 검토의견이 적정한 것으로 판단되므로, 총무부에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  책임건설사업단 검토보고서 1부.  끝.